문서번호	시설관리과-25548
결재일자	2022. 6. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
주세진		代조광희	06/28
			송병욱
협조

설계변경 심의결과 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 6.

북부수도사업소

시설관리과

설계변경 심의결과 보고

우리사업소에서 시행중인 「2021년 미아동 외 4개동 상수도공사(장기계속단가계약)」의 신규공종 및 시공물량 증·감 등에 따른 설계변경 심의회를 개최하고 그 결과를 보고드림.

1. 공사 개요

1) 공 사 명: 2021년 미아동 외 4개동 상수도공사(장기계속단가계약)

2) 계약기간: 2021. 6. 9. ~ 2022. 06. 30.

(총부기기간 : 2022. 1. 1. ~ 2022. 06. 30.)

3) 공사비 변경

구 분	금 액		증·감(원)	기 간
	당 초(원)	변 경(원)
총부기금액	***********	***********	*************	**********************
1차수 금액	***********	***********	*	**********************
2차수 금액	***********	***********	**************	**********************

4) 도 급 자: ****************

5) 감 리 자: ************

2. 심의회 개최현황

1) 심의일정: 2022. 6. 28. 10:00

2) 심의장소: 시설관리과 사무실

3) 심의위원장: 시설관리과장

4) 심의위원: *************************************

5) 간    사: ********

3. 심의 내용

1) 물량변동의 적정성 여부

2) 제경비 적정산정 및 적용의 적정성 여부 등

4. 심의 결과

1) 설계변경의 타당성 : 타당함

2) 신규공종 단가 산축 적정 여부 : 적정함

3) 계약변동(증·감)물량 계약단가 낙찰률 적정 적용 여부 : 적정함

4) 제경비 적정 산정 및 적용 적정성 : 적정함

5) 각종 제반규정 준수 여부 : 준수

5. 조치 의견

위와 같이 설계변경 내역 심의결과 설계변경이 타당하고 검토항목이 적정하여 본 심의결과에 의거 설계변경 시행 및 변경계약을 의뢰코자 합니다.

붙 임: 1.설계변경 검토의견서 1부.

2.설계변경 사유서 1부.

3.설계변경 내역서 1부.  끝.