투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
		서울특별시도시기반시설본부
수신	내부결재
(경유)
제목	업무지시전(신길역교차로 좌측 노견 가드레일 우선시공 승인)

1. 업무지시현장 : 노들로 구조개선공사(장기1차) (주)평산포장건설, 노들로 구조개선공

사(장기1차) 주식회사 도화엔지니어링, 노들로 구조개선공사(장기1차)

하송종합건설(주)

2. 작 성 일 자 : 2022-06-27 18:06:33

3. 지 시 내 용

가. 노들건 2022-210호(2022. 6. 27.)와 관련입니다.

나. 신길역교차로 좌측 노견 가드레일 우선시공 승인요청과 관련하여 검토 후 승인처리하오니 공사 추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

1) 보고내용 : 실시설계 완료 이후 교통규제심의가 변경(최종)됨에 따라 도면에 맞게 시공하기 위하여 신길역 교차로 좌측 노견 가드레일 이설 필요

2) 이설규모 : 가드레일 약174m, 예상 증가 개략공사비 1,573천원

3) 우선시공 승인사유

- 실정보고 제출 및 승인까지 다소 시일이 소요되는바, 경미하게 변경되는 사항에 대하여 우선시공 승인하여 우기철 교통안전사고를 예방하고자함.

붙임 : 가드레일 이설 우선시공 승인요청 1부.  끝.

주무관	이승훈		교량건설과장	06/28
황윤기
협조자
시행	토목부-25778	(	2022.06.28	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동)	/	http://seoul.go.kr
전화	02-3708-2570	/전송	02-3708-2599	/	lsh94@seoul.go.kr	/	대시민공개