문서번호	계측관리과-22568
결재일자	2022. 6. 28.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		계측관리과장	요금관리부장
박철호		代박철호	06/28
			안병희
협조	계량기관리팀장		최성진
	주무관		최용원

검침 고 위험 계량기 우선 교체 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

계 측 관 리 과

검침 고 위험 계량기 우선 교체 계획

차도, 고심도 등 검침 직원의 안전사고 우려가 있는 계량기실의 계량기를 만기도래전 신속한 교체와 원격 전환으로 직원의 안전사고를 예방하고자 함

Ⅰ		사업의 필요성

□ 서울시설공단 상수도지원처장 본부장 면담시 고 위험 검침수전에 대한 원격검침 전환 요청

ㅇ 상수도지원처장 외 3명 본부장 면담(2022.6.22.)

□ 만기도래 전 先 교체로 검침 직원의 안전사고 예방

Ⅱ		고위험 검침수전 현황

□ 위험 요인별 원격검침 전환 요청 대상

계	L자형	고심도	차도	비 고
304	67	201	36

□ 원격전환 추진 대상

합 계	추진대상	제외대상
		소계	기 완료	교체장애	중복수전	급수탑 (미검침)
304	227	77	60	10	3	4

- 구경별 추진대상

합 계	80mm	100mm	150mm	200mm	250mm	300mm
227	70	48	54	38	15	2

Ⅲ		추진방법

□ 제외 대상 수전 원격전환

ㅇ 기 완료 수전(60개소) : 22.8월까지 단말기 설치 및 원격전환

- '22년 단말기 구매설치(1,900개) 계약 : '22.04.08.('22.7. 납품예정)

ㅇ 교체장애수전(10개소) : 급수부 재정비 요청

□ 추진대상 227개소 원격전환

ㅇ 계량기 교체

- 교체 주체 : 서울시설공단 대형교체반(9명)

- 교체 기간 : '22.07. ~ '22.08. 집중 교체

※ '22년 원격검침전환사업대상인 중부(대현산 04, 북악02블럭)과 함께 다른 수전보다 우선하여 교체

- 교체 중 교체장애수전 별도 관리로 금년내 완료되도록 조치

※ 관할사업소, 계측관리과, 급수설비과 통보

ㅇ 단말기 설치

- 설치 주체 : 단말기 제조 납품업체********

- 설치 기간 : '22.07. ~ '22.12.

※ 계량기 교체이후 3일이내 업체에 통지, 설치업체는 통지일로부터 2주이내 단말기 교체 완료 조치

- 차량 통행 및 작업자 안전을 고려하여 차도에 설치된 수전은 후 순위로 하여 단말기 설치업체와 동시 작업추진('22.8월 부터)

Ⅳ		행정사항

□ (계측관리과)

ㅇ 디지털계량기 우선 교체 요청(대상내역 붙임 1)

ㅇ 제외 대상수전 중 교체장애수전(10개소) 정비 요청(붙임 2)

□ (수도자재관리센터)

ㅇ 고 위험수전 원격전환에 따른 디지털계량기는 추가 구매

ㅇ 디지털계량기 우선 교체(고 위험 수전+중부 원격대상)

- 교체 중 발생되는 교체장애수전은 계측관리과, 급수설비과, 관할 사업소로 통보

ㅇ 차량 통행 및 작업자 안전을 고려 차도에 설치된 수전은 후 순위로 하여 단말기 설치업체와 동시 작업추진('22.8월이후)

붙임  1. 디지털계량기 교체대상(227건) 1부.

2. 교체장애수전 재정비요청 내역 1부.