투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	건설사업관리용역 재개 및 계약변경 의뢰 (서울 어울림체육센터 건립공사)

우리 본부에서 시행중인 '서울 어울림체육센터 건립공사 건설사업관리용역'과 관련하여 용역을 재개하고 중지기간에 따른 기간변경에 대하여 변경계약 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 계약명 : 서울 어울림체육센터 건립공사 건설사업관리용역(감독권한대행)

2. 계약자 : **************** 외 2

3. 용역재개일 : 2022. 6. 29.(수) ※ 중지기간 : '21. 6.11.~'22. 6.28.

4. 변경계약내용

구분		변경전	변경후	증감
총차	기간	'20. 3.10.~'23. 9.18.(1288일)	'20. 3.10.~'24.10.5.(1671일)	증383일
	금액	**************	**************	변동없음
2차	기간	'21. 2. 3.~'21. 8.29.(208일)	'21. 2. 3.~'22. 9.16.(591일)	증383일
	금액	************	************	변동없음

붙임: 용역사 변경계약 요청공문 1부.  끝.

	건 축 부 장
주무관	양희식		문화시설과장	박근우		건축부장	06/28
신명승
협조자
시행	건축부-25469	(	2022.06.28	)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 청계천로 8, 프리미어플레이스 빌딩 13층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-3708-2627	/전송	02-3708-2659	/	hanok8303@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)