투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	관급자재 납품기한 연기 요청[새로운 광화문광장 조성사업(목재-이페), 총액계약]

우리부에서 시행중인 『새로운 광화문광장 조성사업(시민광장)』 에 소요되는 관급자재(목재-이페)에 대하여 아래와 같이 납품기한 연기 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

▢ 납품기한 연기요청 내역

- 건명 : 새로운 광화문광장 조성사업 관급자재(목재-이페) 구매

계약번호	품명	납품기한		납품업체	비고
		당초	변경
2022040C4D000	덱(Deck), 이페 (T40×90×VAR㎜)	2022. 6. 30.	2022. 7. 31.	주식회사 제이에스조경	총액 계약

▢ 변경사유 : 시공계획 일정 조정에 따른 납품기한 연장

붙임   합의각서 및 계약서(당초) 각 1부.  끝.

	방 재 시 설 부 장
주무관	김희숙		공원시설과장	이병호		방재시설부장	06/28
이동훈
협조자	주무관	김현곤		주무관	손병도
시행	방재시설부-24346	(	2022.06.28	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동)	/	https://www.seoul.go.kr
전화	02-3708-8733	/전송	02-3708-8756	/	khs2012@seoul.go.kr	/	부분공개(5)