문서번호	한양도성도감-22986
결재일자	2022. 6. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		도성보존팀장	한양도성도감과장
김창건		윤용훈	06/28
			김홍진
협조

한양도성 유산구역 보존을 위한 성벽 주변 절개지 지반보강 공사 문화재 감리용역 시행계획

한양도성 유산구역 보존을 위한 성벽 주변

절개지 지반보강 공사 문화재감리 용역 시행계획

2022.  6.

문  화  본  부

(한양도성도감)

성벽 주변 절개지 지반보강 공사 문화재 감리용역 시행계획

한양도성도감과장 :김홍진☎2133-2650 도성보존팀장 : 윤용훈☎2659 담당 : 김창건☎2663

「한양도성 유산구역 보존을 위한 성벽 주변 절개지 지반보강 공사」에 대한 문화재 비상주감리 용역을 시행하고자 함

Ⅰ		공사개요

ㅇ 공 사 명 : 한양도성 유산구역 보존을 위한 성벽 주변 절개지 지반보강 공사

ㅇ 공사위치 : 성북구 성북동 113-76번지 일대

ㅇ 공사기간 : 착수일로부터 4개월

ㅇ 총사업비 : 221,660천원(국비 155,162천원, 시비 66,498천원)

- 시설비 : 208,260천원, 감리비 : 1,200천원, 시설부대비 : 1,400천원

ㅇ 공사내용 : 절개지 지반보강(토공 및 사면 보강 공사, 석축 공사 등)

	< 추진배경 >
▸ 한양도성 문화재보호(유산)구역 내 성벽에 인접해 있는 토지, 건축물로 인한 성벽 훼손방지, 경관보호, 보수공간 확보 등을 위해 사유지 매입 ▸ 경사지에 위치한 매입 건축물을 철거완료(하부기초 등 존치) 하였으나, 지반 고저차(약7~8m)가 높아 절개지 지반보강 및 사면 안정화 필요

※ 대상지 현황

Ⅱ		추진경위

ㅇ ’21.10.21. : 지반보강 설계용역 시행계획 수립

ㅇ ’21.12. 1. : 지반보강 설계용역 착수

ㅇ ’22. 6. 7. : 지반보강 설계용역 완료

ㅇ ’22. 6.10. : 지반보강 공사 시행계획 수립

ㅇ ’22. 6.20. : 공사입찰 공고

Ⅲ		감리 발주계획

ㅇ 용 역 명 : 한양도성 유산구역 보존을 위한 성벽 주변 절개지 지반보강 공사 문화재 비상주감리 용역

※「문화재수리 등에 관한 법률 시행령」〔별표11〕일반감리를 하는 문화재

감리원의 배치기준에 의거 비상주문화재감리원 배치

ㅇ 계약방법 : 수의계약

- 「지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 제9조, 같은 법

시행령 제25조제1항제5호나목

ㅇ 수의계약 대상자

*************************

*****************************************

*******************************************

**************************

ㅇ 수의계약 사유

- 당해 예정 감리비가 소액으로 수의계약이 가능하고, 원활한 문화재 감리수행을 위하여 한양도성 관련 감리 실적이 있는 업체와 수의계약 추진

ㅇ 용역기간 : 착수일로부터 4개월

*****************************************

ㅇ 예산과목

- 문화본부 한양도성도감, 한양도성 보존·관리·활용, 한양도성 보존·활용, 한양도성 유산구역 보존을 위한 위험 성벽 절개지 지반보강, 시설비, 감리비 및 시설부대비

Ⅳ		향후계획

ㅇ 추진일정

- ’22. 6. : 감리용역 발주

- ’22. 7. : 감리용역 계약 및 착수

- ’22.11. : 감리용역 준공

※ 감리용역 계약은 공사 계약 일정에 맞게 조정 추진

붙임  1. 감리비 내역서 1부.

2. 과업내용서 1부.

3. 견적서 2부.  끝.