문서번호	치수과-21692
결재일자	2022. 6. 28.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	치수과장	시설부장		한강사업본부장
이성연	최연호	박상보		06/28
				윤종장
협 조
	총무부장		송영민
	총무과장		정현석
	기반시설과장		이병철
	주무관		임영준

「선유도 보행잔교 및 수상갤러리 조성 기본 및 실시설계용역」

준공기한 연기 검토 보고

2022. 6.

한강사업본부

(시  설  부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료, 빅데이터 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

「선유도 보행잔교 및 수상갤러리 조성 기본 및 실시설계용역」

준공기한 연기 검토 보고

「선유도 보행잔교 및 수상갤러리 조성 기본 및 실시설계 용역」관련 준공기한 연기 실정보고 사항에 대하여 검토 보고 드림

		용역개요

□  용 역 명

- 선유도 보행잔교 조성 기본 및 실시설계용역 (치수과)

- 한강수상갤러리 조성 기본 및 실시설계용역 (기반시설과)

□  계약금액 : 332,567천원(보행잔교), 456,447천원(수상갤러리)

□  용역수행자 : ㈜삼풍이엔지종합건축사사무소 외 4개사

□  계약기간 : 2020. 12. 03. ∼ 2022. 06. 30.

□  과업내용

- 보행잔교 및 부대시설 설계 일체(상부 잔교 223m, 하부 잔교 180m)

- 월드컵분수 재활용 수상갤러리 조성 설계 일체(직경 21m, 높이 10m)

		추진경위

□  2018. 05. ~ 12. : 월드컵분수 개선 설계용역 시행

□  2018. 11. ~ 2019. 10 : 보행잔교 타당성조사 및 기본계획 용역 시행

□  2019. 01. : 월드컵분수 활용방안 검토 보고 (행정2부시장 방침)

- 월드컵분수 안전조치(행주대교 남단 거치), 한강수상갤러리로 기능 전환 추진

□  2020. 02. ~ 09. : 설계공모 시행 (도시공간개선단)

- 당 선 작 : 선유의 중정 및 빛의 기둥 (삼풍이엔지종합건축사사무소)

□  2020. 12. 03. : 기본 및 실시설계용역 착수

□  2021. 03. 19. : ***************************

□  2021. 07. 26. : ****************

- ********************************************

□  2021. 08. 23. : ***************

		실정보고

□  관련근거

- 용역사 과업기간 연장 요청 : (주)삼풍이엔지종합건축사사무소

► 문서번호 SPG-22-06B(2022.06.17.), 문서번호 SPG-22-06C(2022.06.17.)

- 선유도 관리부서 업무협조 요청 : 서부공원녹지사업소

► 문서번호 시설과-21661(2022.05.25.)

□  보고내용(요약)

- 과업기간 변경

당 초	변 경	비 고
´20.12.03. ~´22.06.30	´20.12.03. ~´22.12.22	****************************** *********************** *****************************

- 사      유

► ************************************************************************************************************

► ****************************************

·**************************************************************************************************************

► *********************************

·*********************************************

- 예정공정표

구 분	7월					8월					9월					10월 ~ 12월
	1주	2주	3주	4주	5주	1주	2주	3주	4주	5주	1주	2주	3주	4주	5주	10월	11월	12월
****
*******
**** *********
**** *** ******
******* **
** **** ******

		조치계획

□  상기 보고 내용과 같이 잔여과업 수행에 필요한 기간에 대하여 연장 계약체결, 사업 추진에 만전을 기하고자 함

※ 지체상금 부과 대상여부 : 미부과 대상

		향후일정

□ `22. 07. ~ 08. : **************

□ `22. 07. ~ 08. : ******************

□ `22. 07. ~ 11. : **********

□ `22. 08. ~ 10. : ************************************

※ *************************************

□ `22. 09. ~ 10. : *****************************

□ `22. 11.        : *********************

		행정사항

□  준공기한 연기 및 변경계약 의뢰

□  ******************************************************************************************

※ *************

***********************************************

붙 임 : 1) 용역사 실정보고서(공문 및 예정공정표) 각1부

2) 유관부서 협의요청 공문 1부

3) 준공기한 연기 의뢰서 1부. 끝.