투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시한강사업본부
수신	총무과장
(경유)
제목	준공기한 연기에 따른 변경계약 의뢰

우리부서에서 시행중인 「선유도 보행잔교 조성 기본 및 실시설계용역」에 대하여 아래와 같이 준공기한 연기를 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 용 역 명 : 선유도 보행잔교 조성 기본 및 실시설계용역

2. 용역기간 : 2020. 12. 03. ~ 2022. 06. 30.

3. 계약금액 : 332,567,000원

4. 계 약 자 : (주)삼풍이엔지종합건축사사무소 대표 정국한 외4개사

5. 준공기한 연기사유 : 붙임 방침서 및 연기 의뢰서 참조

6. 준공기한 연기내역

가. 당초 : 2020. 12. 03. ~ 2022. 06. 30.

나. 변경 : 2020. 12. 03. ~ 2022. 12. 22.

7. 지체상금 부과여부 : 미부과(귀책소재 : 한강사업본부)

붙임 1. 방침서 1부

2. 준공기한 연기 의뢰서 1부

3. 합의각서 1부(별도송부). 끝.

	치 수 과 장
주무관	이성연		치수과장	06/28
최연호
협조자	주무관	김동호
시행	치수과-21715	(	2022.06.28	)	접수		(		)
우	04770	서울특별시 성동구 강변북로257(성수동1가 642-25) 1층(한강사업본부)	/	http://hangang.seoul.go.kr
전화	02-3780-0695	/전송	02-3780-0744	/	richyon@seoul.go.kr	/	부분공개(5)