“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강서수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	설계변경 계약의뢰-2021년 강서구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사

1. 우리사업소에서 시행 완료한『2021년 강서구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(장기계속)』에 대하여 아래와 같이 계약의뢰 합니다.

가. 공 사 명: 2021년 강서구 관내 상수도시설물 설치 및 보수공사(장기계속)

나. 공사개요: 당초 밸브교체 및 변실정비 135개소 → 변경 밸브교체 및 변실정비 83개소

다. 공사기간: 2021. 6. 21.~2022. 6. 30.

라. 공사업체: ***************

마. 설계변경 내역

(단위: 원)

구분	당초	변경	증·감	비고
총 부기금액	***********	***********	************
1차수 금액	***********	***********	*
2차수 금액	***********	***********	************

바. 설계변경 조정 사유: 계약물량 증·감, 신규공종 반영 등

사. 예산과목: 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비및부대비, 시설비(노후밸브정비)

상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비(배수지 등 정밀안전진단·점검 및 시설정비)

소방용수시설등의 설치 및 관리, 소방용수시설설치및보수 등

붙임  1. 설계변경 심의위원회 개최 및 결과보고 각 1부.

2. 설계변경 심의 결과서 1부.

3. 설계변경 내역서 1부.

4. 설계변경 합의서 1부.

5. 제비율 검증확인서 1부.  끝.

	시 설 관 리 과 장
시설관리팀장	정수용		시설관리과장	06/28
代김형식
협조자
시행	시설관리과-26262	(	2022.06.28	)	접수		(		)
우	08013	서울특별시 서대문구 서소문로 51 서울시 상수도사업본부 시설관리부(4층) (합동)	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-31416-1522	/전송	02-3146-4039	/	yong1492@seoul.go.kr	/	부분공개(5)