문서번호	기전과-24542
결재일자	2022. 6. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	기전과장
이석희		이지영	06/29
			代박신범
협조

교통안전표지 원인자부담공사 변경승인 검토 보고 「고덕주공 6단지 주변 교통안전시설물 설치공사」

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 6. 29.

동부도로사업소

(기전과)

교통안전표지 원인자부담공사 변경승인 검토 보고

고덕주공 6단지 주변 교통안전시설물 설치공사 관련 원인자부담공사 공사기간 변경승인 요청에 대한 검토 보고

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 고덕주공 6단지 주변 교통안전시설물 설치공사(표지)

ㅇ 공사위치 : 강동구 상일동 124번지 일대

ㅇ 공사기간 : *******************

ㅇ 원인자 및 업체현황

구 분	원 인 자	설 계 사	감 리 사	시 공 사
표 지	*******************	********	********	*********

□ 검토내용

ㅇ 규제심의 : 서울특별시경찰청 교통관리과-22200호(2020.11.02.)

ㅇ 변경사항

구 분	당 초	변 경
공사기간	******************	*******************

ㅇ 변경사유 : 고덕자이아파트 앞 교차로 횡단굴착 지연에 의한 공사기간

연장 요청

□ 검토의견

ㅇ *******************에서 시행하는 고덕주공 6단지 주변 교통안전시설물 설치공사 관련 원인자부담공사 공사기간 변경승인요청에 대하여 현장 확인 및 승인서류를 검토한 바, 적정하므로 조건부 승인 처리하고자 합니다.

붙임  1. 원인자부담공사 변경승인 요청 공문 1부.

2. 서울특별시경찰청 규제심의 공문 1부.

3. 설계도면 1부.

4. 설계서 1부.

5. 감리사 서류(기술검토의견서) 1부.  끝.