문서번호	도시철도설비부-23449
결재일자	2022. 6. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		신호과장	도시철도설비부장
전성완		代전성완	전결 06/29
			김중영
협조

별내선(8호선연장) 신호보안설비공사(2공구)(총차, 1차)

준 공 기 한   연 기   검 토   보 고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 6.

도시기반시설본부

(도시철도설비부)

별내선(8호선연장) 신호보안설비공사(2공구)(총차, 1차)

준 공 기 한   연 기   검 토   보 고

별내선(8호선연장) 신호보안설비공사(2공구)(총차, 1차)의 선행공정 지연으로 감리단으로부터 준공기한 연기 요청이 있어 공사의 원활한 추진과 공정관리를 위하여 준공기한을 연기하고자 검토 결과를 보고드림

Ⅰ		관 련 근 거

ㅇ 별내선(8호선 연장) 신호보안설비공사(2공구) 1차 준공기한 연기      요청에 대한 검토 보고(별내선시감 제22-528호, '22.06.29.)

Ⅱ		공 사 개 요

ㅇ 공 사 명: 별내선(8호선연장) 신호보안설비공사(2공구)

ㅇ 공사구간: BN2제어범위(2km800) ~ BN6(12km905)

ㅇ 공사기간: 2021.7.19 ~ 2023.10.16(총차)

2021.7.19 ~ 2022.7.18(1차)

ㅇ 공사내용

- 신호보안설비공사(본선 10.105km)

- 신호기장치 152기, 전기선로전환기 10대 설치

- 궤도회로장치 152조, ATO / ATC / TWC 119개소

ㅇ 계약금액 : 4,975,869천원 (1차 1,915,907천원)

ㅇ 계 약 자 : (주)서우건설산업 대표 이종근 외 2개사

ㅇ 감 리 단 : (주)에이알텍 대표 이상남

Ⅲ		그간 추진현황

ㅇ ’21.2.26 : 공사 발주계획 수립

ㅇ ‘21.3.24 : 공사 발주

ㅇ ’21.6.23 : 계약 체결

ㅇ ’21.7.19 : 신호보안설비공사(2공구) 공사 착공

ㅇ ’22.6.    : 케이블트레이 조립 및 설치중(공정률 10%)

Ⅳ		검 토 내 용

ㅇ 준공기한 연기 사유 : 선행공정 지연에 따른 절대공기 부족

- BN2역 : 토목 3공구 4k832지점 싱크홀 발생('20.8.26)후 복구 지연,                    나머지 터널구간은 토목공사 시행중. 건축공사 미시행

- BN3역 : 터널구간 토목공사 시행중 및 건축공사 미시행

- BN4역 : 토목공사 완료되어 전선관로 설치 중이나, 궤도분야 레일작업                미시행으로 신호 추가 공정 진행 불가

- BN5역 : 터널내 궤도분야 궤광작업중 및 신호기계실 건축공사 미시행

- BN6역 : 궤도분야 레일 궤광작업 및 콘크리트 타설중. 신호기계실                   건축공사 미시행

ㅇ 공사기간 변경 현황

구 분		변 경 전	변 경 후	비 고
공사기간	총 차	2021.7.19. ~ 2023.10.16.	2021.7.19. ~ 2023.10.16.	변동없음
	1 차	2021.7.19. ~ 2022.7.18.	2021.7.19. ~ 2022.11.30.	135일 연장

ㅇ 공사비 변경 현황 : 공사비 변경 없음

ㅇ 지체상금 부과여부 : 미부과

ㅇ 감리단 검토 의견

- "별내선(8호선 연장) 신호보안설비공사(2공구)" 중 1차공사는 토목, 건축,       궤도 등 선행공정 지연으로 준공기한을 연기하여 추진함이 타당함

Ⅴ		조 치 의 견

ㅇ 감리단의 준공기한 연기 요청사항을 검토한 결과 선행공정 지연에      따른 신호공사 연기 검토내용이 적정한 것으로 판단되어 총무부에      변경계약을 의뢰코자 함

붙임  감리단 준공기한 연기 요청 검토 보고서 1부.  끝.