상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	용역 계약사항 변경(예정) 알림

1. 공공재생과-5819(2017.5.29.)호와 관련입니다.

2. 「남산 예장자락 재생사업」 추진에 따른 「남산 예장자락 재생사업 기본 및 실시설계 용역」에 대하여 아래와 같이 계약사항이 변경될 예정임을 알려드리니,

3. 시민휴식공간이 조속히 조성될 수 있도록 업무추진에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.

가. 계약 변경사항

구 분	당 초	변 경	비 고
용역내용	‣공원‧주차장 설계 ‣전문가 자문비 (8개월) ‣측량, 지반조사, 모형제작	‣공원‧주차장 설계 ‣전문가 자문비 (12개월) ‣측량, 지반조사 ‣소방재난본부 리모델링
용 역 비	1,590,000천원	1,666,200천원	증) 76,200천원
용역기간	’16.4.8~’17.5.31	’16.4.8~’17.7.20	증) 50일

나. 계약 변경사유 : 소방재난본부 리모델링(안) 설계 및 인‧허가 진행을 위해 50일 추가

붙임 : 용역변경방침서 1부. 끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	서울특별시도시기반시설본부장(건축부장),서울특별시도시기반시설본부장(설비부장),서울특별시도시기반시설본부장(방재시설부장)
주무관	배현경		특화공간조성팀장	안중욱		공공재생과장	05/30 홍선기
협조자
시행	공공재생과-5902	(		)	접수		(		)
우	04524	서울특별시 중구 세종대로 110	/
전화	2133-8705	/전송	2133-0885	/	xodiddls@seoul.go.kr	/	대시민공개