문서번호	기전설비과-21659
결재일자	2022. 6. 29.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		기전설비과장	시설부장
이재돈		김상동	06/29
			박상보
협조

한강공원 CCTV 설치 통신공사(3구역)

설계변경(계약금액, 준공기한) 검토 보고

2022. 6.28

한강사업본부

(기전설비과)

한강공원 CCTV 설치 통신공사(3구역)

설계변경(계약금액, 준공기한) 검토 보고

한강공원내 범죄와 안전사고를 예방하고자 시행중인 한강공원 CCTV 설치 통신공사의 설계변경(계약금액, 준공기한)에 대하여 보고함.

Ⅰ		공사개요

○ 공 사 명 : 한강공원 CCTV 설치 통신공사(3구역)

○ 계 약 일 : 2021.12.10

○ 계약금액 : 435,827,750원

○ 계약기간 : 2021.12.13 ~ 2022. 6.30

○ 공사위치 : 잠원, 반포, 여의도, 강서공원

○ 계 약 자 : (주)국제비엠에스

○ 감독기관 : 서울시설공단 공사감독3처

Ⅱ		설계변경 내용

○ 계약금액 변경

(단위:원)

구 분		금 액		증·감금액	비 고
		당 초	변 경
도급 금액	공급가액	396,207,045	363,186,364	-33,020,681
	부가세	39,620,705	36,318,636	-3,302,069
	계	435,827,750	399,505,000	-36,322,750

○ 준공기한(연장) 변경

- 당 초 : 2022. 6.30

- 변 경 : 2022. 7.15

○ 설계변경 사유

- 공사 실정 보고 및 승인 : 현장 여건에 따른 공사물량 증·감 및 보험료 정산

• 서울시설공단 공사감독3처-1464호(2022. 3. 8), 공사감독3처4926호(2022.6.21)

공사감독3처-5222호(2022. 6.27)

• 본부 기전설비과-20031호(2022. 3.24), 기전설비과-21521호(2022. 6.22)

- 준공기한(연장)

→ 공사 현장 여건상 절대공기 부족으로 15일 공사기간 연장 필요

• '22년 1월 ~ 6월 기간에 15일 강우로 인하여 작업 미시행

• 코로나19 바이러스 방역 완화로 평일 한강공원 이용 시민 증가 및 주말
공사 시행이 어려워 절대공기 부족

○ 주요 설계변경 내용

구 분	주요 변경내용	비 고
공사물량	-아스팔트 절단 : 788m→267m -아스팔트 포장 깨기 : 29.55㎥→9.6㎥ -터파기 : 2551.14㎥→2563.56㎥ -잔토처리 : 46.06㎥→0㎥ -난연전력케이블(F-CV 6㎟*3C) ·8478m→8,031m -합성수지 파형관(ELP 30mm 무선) ·420m→138m -합성수지 파형관(ELP 30mm) ·7079m→6971m -기초대(1.4×1.4×1.4m): 3개소→0개소 -기초대(1.4×1.1×1.4m): 32개소→0개소 -기초대(0.8×1.4×1.4m) : 0개소→29개소 -기초대(0.6×1.6×1.6m) : 0개소→2개소 -부착대(2m) : 28개소→30개소 -제어함체 : 52개→47개소 -무선폴(3M,STS) : 0개소→1개소 -보행도우미 : 0인→41인 -교통정리원 : 0인→15인 -콘크리트 절단 : 0m→73m -콘크리트 깨기 : 0㎥→22.57㎥ -CCTV 폴(10M) : 3본→2본 -CCTV 폴(8M) : 7본→7본 -AP 폴(8M) : 11본→8본, -기타사항(별첨참조)
보험료 정산 등	-건강보험료 : 4,815,880원→0원 -연금보험료 : 6,318,210원→0원 -노인장기요양보험료 : 554,789원→0원 -퇴직공제부금비 : 3,229,307원→0원 -산업안전보건관리비 ·6,263,138원→3,408,950원 -고용개선지원비 : 8,660,567원→0원

○ 예산과목

- 한강공원 관리 및 운영, 한강공원 시설 관리 및 개선, 한강공원 CCTV 확대

설치, 시설비(사고이월)

Ⅲ		향 후 계 획

○ 총무과에 설계변경(계약금액 및 준공기한) 계약 의뢰

○ 준공검사

붙 임  1. 공사감독 설계변경 보고서 1부.

2. 설계변경 내역서 1부.

3. 제비율 검증확인서 1부.

4. 강우량 현황 1부.  끝.