“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	북부수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	변경계약 의뢰(2021년 수유1동외 8개동 상수도공사-최종)

우리사업소에서 시행 중인 2021년 수유1동외 8개동 상수도공사(장기계속단가계약) 설계변경(최종)에 따라 변경계약을 의뢰하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

1. 공 사 명: 2021년 수유1동외 8개동 상수도공사(장기계속단가계약)

2. 계약업체: *******************

3. 계약기간: **************************(총부기기간)

- 1차 부기: 2021. 4. 19 ~ 2021. 12. 31

- 2차 부기: 2022. 1. 1 ~ 2022. 6. 30

4. 변경내역                                                              (단위: 원)

구 분	당 초	변 경	증 감
총공사비	***********	***********	**************
1차 부기금액	***********	***********	*
2차 부기금액	***********	***********	**************

5. 설계변경 사유 : 신규공종 및 계약물량 증.감 사항 발생

6. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비, 급·배수공사비, 신설공사비-33201

상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 개조공사비(급수공사)-33201

소방용수시설설치,소방용수시설들의설치및보수, 소방용수시설-401-01

자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비(배급수관신설및연결)-22104

상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수선유지교체비(지원사업성시설비)-22203

붙임  1. 설계변경 시행 방침서 1부

2. 설계변경사유서 1부

3. 변경내역서 1부

4. 결과통보서 1부

5. 검토의견서 1부

6. 합의서 1부

7. 검증확인서 1부.  끝.

	시 설 관 리 과 장
주무관	진하영		시설관리팀장	김성호		시설관리과장	06/29
송병욱
협조자
시행	시설관리과-25630	(	2022.06.29	)	접수		(		)
우	01137	서울시 강북구 한천로 935(번동)	/	https://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-3409	/전송	02-3146-3439	/	jhy1234@seoul.go.kr	/	부분공개(5)