“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	강동수도사업소
수신	행정지원과장
(경유)
제목	설계변경(2차, 최종)시행후 계약내역서 일부변경 통보 (2021년 천호1동 외 7개동 상수도공사)

1. 시설관리과-26848(2022. 6. 29.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여『2021년 천호1동외 7개동 상수도공사(장기계속단가계약)』수정사항에 대하여 아래와 같이 안내드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 공 사 명 : 2021년 천호1동 외 7개동 상수도공사(장기계속단가계약)

나. 도 급 자 : *****************

다. 계약기간 : 2021.6.1. ~ 2022.6.30.(총 공사부기기간:2021.6.1.~ 2022.6.30.)

라. 설계변경 내용 : 내역서 수정

마. 설계변경 내역                                                     (단위 : 원)

구 분	최 종 변 경(2차)	비고
총 부기금액	658,830,000	변경없음
1차 부기금액	298,724,000	-
2차 부기금액	360,106,000	-

바. 설계변경 사유 : 시공물량 증,감 및 신공종 발생 계약금액 변동 없음

사. 예산과목 : 상수도사업비용,영업비용,급.배수공사비,신설공사비

상수도사업비용,영업비용,배급수비,수선유지교체비(교체장애수전,불용관)

상수도사업비용,영업비용,배급수비,지원사업성시설비(수도계량기보온재)

자본적지출,유형자산취득,구축물,시설비및부대비, 시설비

붙임  1. 설계변경 내역서 수정보고 1부.

2. 설계변경 내역서(2차 최종) 1부.

3. 합의서 1부.  끝.

	시 설 관 리 과 장
주무관	김성준		시설운영팀장	송종학		시설관리과장	06/29
이규희
협조자
시행	시설관리과-25839	(	2022.06.29	)	접수		(		)
우	05397	서울특별시 강동구 성내로 51, 강동수도사업소	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-5207	/전송	02-3146-5239	/	sungjunk98@seoul.go.kr	/	부분공개(6)