문서번호	도로보수과-23487
결재일자	2022. 6. 30.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	도로보수과장	남부도로사업소장
정철식	한수영	06/30
		代이정국

집중호우로 인한 파손도로 응급복구 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

도 로 보 수 과

집중호우로 인한 파손도로 응급복구 계획

지난 6월 27일부터 시작된 집중호우로 현재 중앙버스전용차로 및 가변차로 버스정류장을 중심으로 아스팔트 파손 발생구간이 산발적으로 발생되고 있고, 기동반에서 포대아스콘으로 응급복구 하고 있으나 중차량 운행으로 재 파손되고 있어 파손이 심한 구간에 대해 긴급복구 업체를 투입하여 항구복구를 추진하고자 함.

Ⅰ		도로파손 실태

○ 집중호우 : 2022. 6. 27(월) ~ 7. 1(금)예정

※ 호우경보 2022.6.30(목) 00:30 발효)

○ 누적강수량(6.30일 14:00 현재) : 161mm

○ 도로파손 현황 : 포트홀(90%), 물고임 등

- 중앙버스전용차로 : 여의대방로, 신반포로, 강남대로, 동작대로, 과천                       대로, 시흥대로, 노량진로

- 일반차로 : 현충로, 사평대로, 시흥대로

○ 현황사진

Ⅱ		응급복구 세부계획

○ 일    자 : 2022. 7. 2(토) ~ 7. 4(월) (22:00 ~ 06:00)

○ 정비물량 : 아스콘 100톤, 7a (약 65개소)

○ 정비방법 : 긴급복구업체 2개팀

○ 정비구간

- 포트홀 발생 구간 전역(중앙버스전용차로)

※ 발생되는 폐아스콘은 사업소내 적치장에 임시 반입후 익일 반출

○ 기동보수반에서는 차량피해가 발생하지 않도록 임시복구에 치중하여 포대아스콘으로 보수하고, 기상상태에 따라 아스콘으로 응급복구 실시.

Ⅲ		향후계획

○ 2022. 7. 02 ~ : 파손도로에 대해 항구복구 추진

- 긴급복구업체, 기동보수반 등

- 향후 집중호우가 지속적으로 예상됨에 따라 우기후 긴급복구업체 상시    복구 실시.

- 도로파손구간이 많아 시간적인 여유가 없을 경우 굴착복구 및 노후포    장도로 정비업체 투입하여 신속정비 실시.

○ 응급 및 항구복구 물량에 대해서는 추후 설계변경시 반영 조치.

Ⅳ		행정사항

○ 2022. 6. 30  : 긴급복구업체에 응급복구 작업지시

○ 2022. 7. 02  : 사업소내 폐기물 반입(차량 15톤 3대분)

○ 2022. 8.     : 설계변경시 반영.   끝.