문서번호	안전지원과-27294
결재일자	2022. 6. 30.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
담당	장비관리팀장	안전지원과장		소방재난본부장
이광섭	권기백	이홍섭		06/30
				최태영
협 조
	조직경영팀장		김성곤
	경리팀장		김병춘

소방서 차고 매연배출저감장치 제작구매 추가 설치 계획

2022. 6.

소방재난본부

(안전지원과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료, 빅데이터 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	■	□
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	■	□

본문요약

차고 매연배출저감장치 제작구매 추가 설치 계획
’22. 6. 30.(목)	안전지원과장 :이홍섭☎3706-1600 장비관리팀장 : 권기백☎1610 담당 : 이광섭☎1611

소방서 차고 매연을 정화・배출함으로서 소방공무원 호흡 건강 보호 및 미세먼지 저감 등 대기환경 개선에 기여하고자 함

□ 관련근거

❍ 서울시 소방공무원 보건안전 및 복지 조례 제8조(소방공무원 보건안전 및 복지지원)

❍ 소방공무원 보건안전관리 규정 제24조(유해물질 등 차단시설)

□ 사업개요

❍ 사업기간: 2022. 7월 ~ 11월(5개월)

❍ 설치대상: *********************************

❍ 소요예산: *******************************

**************************************************************)

❍ 설치방법: (본부) 2단계 입찰 본부에서 일괄 추진, (소방서) 설치 감독 및  검수

❍ 주요내용: 매연배출저감장치 제작구매 설치*****

- 공정하고 투명한 절차를 통한 효율적인 사업진행(소방서 업무부담 완화)

❍ 세부추진일정

- 규격검토, 계약심사, 사전규격공고 (7월)

- 입찰공고 및 제안서 평가(업체선정) (8월)

- 소방서별 설치 (8월 ∼ 11월)

□ 향후계획

❍ 매연배출저감장치 미설치 관서 추가설치

***	*	***	*****	*****	**
*******	***	***	*** *************	**	********
*********	*****	*****	*****	***

❍ 신축(재건축) 소방관서는 설계 시부터 매연배출저감장치 반영

- 근무환경개선을 위한 -

차고 매연배출저감장치 제작구매 추가 설치 계획

소방서 차고 매연을 정화・배출함으로서 소방공무원 호흡 건강 보호 및 미세먼지 저감 등 대기환경 개선에 기여하고자 함

Ⅰ		관련근거

❍ 소방공무원 보건안전관리 규정 제24조 (유해물질 등 차단시설)

❍ 서울시 소방공무원 보건안전 및 복지 조례 제8조

❍ 소방행정과-1832(2022.1.21.)「2022 회계연도 소방특별회계 예산편성 결과 및 집행지침 알림」

Ⅱ		추진배경

❍ 소방차량 출동·점검·훈련 등으로 발생하는 소방서 차고 내 매연에 상시 노출되는 현장활동대원의 호홉기 보건안전대책 필요

❍ 경유 소방차 디젤엔진 배기가스는 1등급 발암물질로 현장대원의 건강 및 대기질 개선을 위해 매연배출저감장치 설치 필요

❍ 청사 내 사무실 및 대기실이 차고와 인접하고, 차고 개방면적이 협소하여 배기가스 노출 빈도가 높음

Ⅲ		추진계획

개  요

*****************************

*********************************************

*****************************************

❍ 지출과목: 소방활동 운영관리 / 소방서 차고 매연배출저감장치 설치 / 시설비(401-01)

설  치

❍ 기    간: 2022. 7월 ~ 11월(5개월)

❍ 설치기관: *********************************

********************

******************************************************

******************************************************

❍ 설치·계약방법

- (본  부) 본부에서 일괄 추진

(소방관서) 설치 감독 및 검수

- 계약방법: *2단계 입찰(규격·가격분리 동시입찰)

* 지방계약법 제9조(계약의 방법), 같은 법 시행령 제18조

❍ 주요내용

- 공정하고 투명한 절차를 통한 효율적인 사업진행(소방관서 업무부담 완화)

- 매연배출저감장치 제작구매 추가 설치 (50대)

❍ 추가 설치관서 장비회계팀장(계약담당자) 사전 회의: 7월

❍ 소방관서 설치․완공: 8월 ~ 11월

Ⅳ		세부 추진일정

❍ 업체별 규격서 검토.......................................................................7월

❍ 계약심사, 사전규격공고.............................................................7월

❍ 입찰공고 및 제안서 평가(업체선정)..........................................8월

❍ 소방서별 설치감독 및 검수.....................................................8~11월

Ⅴ		기대효과

❍ 매연배출 저감장치 설치를 통한 현장근무대원 호흡기 보호

❍ 유해가스 없는 쾌적한 근무환경 조성

❍ 자연환기, 환풍기보다 효율적인 환기시스템 확보

Ⅵ		향후계획

❍ 매연배출저감장치 추가 설치

***	*	***	*****	*****	**
*******	***	***	*** *************	**	********
*********	*****	*****	*****	***

❍ 신축(재건축) 소방관서는 설계 시부터 매연배출저감장치 반영

붙임 : 2022년 차고 매연배출저감장치 추가 설치대상 1부.  끝.