투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	공사 준공기한 연기에 따른 변경계약 의뢰 [별내선(8호선연장) 신호보안설비공사(2공구)(총차, 1차)]

1. 도시철도설비부-23449(2022.06.29)호와 관련입니다.

2. 우리부에서 시행중인 별내선(8호선연장) 신호보안설비공사(2공구)(총차, 1차) 공사에     대하여 다음과 같이 준공기한 연기에 따른 변경계약을 의뢰하오니 처리하여 주시기      바랍니다.

가. 공 사 명 : 별내선(8호선연장) 신호보안설비공사(2공구)(총차, 1차)

나. 계약현황

구분	계 약 명	계약번호 (관리번호)	공 사 기 간	대표계약자
총차	별내선(8호선연장) 신호보안설비공사(2공구)	21000420 (2*******00)	2021.07.19. ~ 2023.10.16.	㈜서우건설산업
1차			2021.07.19. ~ 2022.07.18.

다. 계약변경 내용

구분	공 사 기 간		비 고
	당 초	변 경
별내선(8호선연장) 신호보안설비공사(2공구)(1차)	2021.07.19. ~ 2022.07.18.	2021.07.19. ~ 2022.11.30	증 135일

※ 총차수 계약기한 및 계약금액 변경없음

1) 변경사유 : 선행공정(토목, 건축, 궤도 등) 지연으로 공사기간 연장

2) 귀책사유 : 경기도

3) 지체상금 부과여부 : 미부과

붙임  1. 공사 준공기한 연기 검토 보고서 1부.

2. 공사 준공기한 연기요청에 대한 검토 보고서(감리단) 1부.

3. 공사기한 연기원 및 사유서[별내선(8호선연장) 신호보안설비공사(2공구)] 1부.

4. 준공기한 연기의뢰서[별내선(8호선연장) 신호보안설비공사(2공구)] 1부.  끝.

	도시철도설비부장
주무관	전성완		신호과장	代전성완		도시철도설비부장	06/30
김중영
협조자
시행	도시철도설비부-23457	(	2022.06.30	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, 프리미어플레이스 빌딩 8층	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-)772-7326	/전송	02-)772-7308	/	akagaeya@seoul.go.kr	/	부분공개(5)