문서번호	토목부-26010
결재일자	2022. 6. 30.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		토목설계과장	토목부장
김종혁		한병찬	06/30
			하현석
협조

준공기한 연기 검토 보고

[서부간선도로 일반도로화 및 친환경공간 조성 소규모 환경영향평가.재해영향평가용역]

2022. 6.

도시기반시설본부

토목부

- 서부간선도로 일반도로화 및 친환경공간 조성 소규모 환경영향평가,재해영향평가용역 -

준공기한 연기 검토 보고

「 서부간선도로 일반도로화 및 친환경공간 조성 소규모 환경영향평가,재해영향평가용역」 대행자가 제출한 준공기한 연기요청에 대하여 검토 보고드림

※ 동일(수자)제22-1771호(2022.6.27.)

□ 관련근거

❍ 준공기한 연기 요청 [동일(수자)제22-1771호(2022.6.27.]

□ 사업개요

❍ 위    치 : 서울특별시 영등포구 양평동(목동교) ~ 금천구 독산동(금천교)

❍ 규    모 : 일반도로화 8.1㎞, 친환경공간 조성 107천㎡

❍ 용역기간 : 2019.11.28.~2022.6.30.

❍ 용역금액 : 178,380,000원

❍ 용 역 사 : ㈜동일기술공사

□ 준공기한 연장

❍ 준공기한 연기 : 92일

- 용역기간 : 당초 '19.11.28.~'22.6.30.⇒ 변경 '19.11.28.~'22.9.30.

❍ 귀책소재 : 서울특별시

❍ 지체상금 : 미부과

❍ 연기사유 : 「서부간선도로 일반도로화 및 친환경공간 조성 실시설계용역」의 준공기한 연기('22.8.31.)에 따라 설계내용 반영 후 환경영향평가 협의를 위한 기간이 소요되어 소규모 환경영향평가,재해영향평가용역의 준공기한을 연기하고자 함

□ 조치의견 : 준공기한을 '22.09.30.까지 연기하여 용역을 관리하고자 함

붙임 : 1.     준공기한 연기 요청서 1부.

1-1. 용역 수행 공정표 1부.

2.     합의각서 1부. 끝.