문서번호	도시철도계획부-23138
결재일자	2022. 7. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	도시철도설계과장	도시철도계획부장		도시철도국장
이민호	강명석	정대현		07/01
				하종현
협 조

도시철도 9호선 4단계 연장사업 3공구 건설공사

작업구 위치 및 종점부 터널공법 검토 보고

2022. 6.

도시기반시설본부

(도시철도계획부)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

도시철도 9호선 4단계 연장사업 3공구 건설공사

작업구 위치 및 종점부 터널공법 검토 보고

「도시철도 9호선 4단계 연장사업 3공구 건설공사」와 관련하여  작업구(집수정) 위치 변경 및 종점부 풍화토 구간 터널공법 변경에 대한 검토 결과를 보고 드림

1		사업개요

o 사 업 명 : 서울도시철도 9호선 4단계 연장사업 3공구 건설공사

o 사업위치 : 고덕아이파크 아파트 ~ 고덕강일1지구

o 사업규모 : 총 연장 1,486m, 정거장 1개소

o 실시설계적격자 : 한신공영㈜ 컨소시엄

o 사업기간 : 2021.12. ~ 2028.7.(2400일)

o 총공사비 : 133,275백만원

2		추진경위

o ′15.06. : 서울특별시 10개년 도시철도망구축계획 확정

o ′18.05. : 예비타당성조사 통과

o ′20.03. : 총사업비 협의(기획재정부)

o ′20.04. : 기본계획 승인(국토교통부)

o ′20.12. : 입찰공고(조달청)

o ′21.05. : 기본설계 및 우선시공분 설계 시행(실시설계적격자)

o ′21.11. : 실시설계적격자 선정 및 실시설계 착수

o ′21.12. : 우선시공분(1차) 공사 착수

o ′21.11.~′22.07. : 본공사분 실시설계

3		검토사항

□ 터널 작업구(집수정) 위치 변경

【 검토 배경 】

o 당초 터널 작업구 및 집수정 위치가 인근 아파트와 근접하여 향후 시공 시 민원 발생 우려

- 당초 기본설계 시 터널 작업구 및 집수정의 위치를 서울~세종 도시고속도로 터널 하부 통과를 위한 종단선형의 최저점으로 계획하였으나,

- 작업구(집수정) 위치가 대단지 아파트와 근접(이격거리 약 13.5m)하여 시공 시 소음 및 진동 등에 따른 극심한 민원 발생 우려

※ 이격거리 : 고덕아이파크 아파트 103동 13.5m, 102동 23.8m

터널 작업구(집수정)와 인근 아파트간 거리

【 실시설계적격자 조치계획 】

*************************************************************************

******************************************************************************************************

**********************************************

***********************

*************************************************************************

*****************************************************

***************************************************

********************************************************

******************************************************************

*****************************

□ 종점부 지반조건 변경에 따른 터널 안정성 재검토

【 검토 배경 】

o 실시설계 시 추가 지반조사 결과, 종점부(약 79m)에서 풍화토 구간이 증가되어 그에 따른 터널 안정성 재검토 필요

- 당초 기본설계에서는 터널 종점부에 대해 측벽부까지 발달된 풍화토층을 고려하여 “직천공 대구경강관 보강공법”으로 계획하였으나.

- 실시설계 시 추가 지반조사(실시설계적격자) 결과, 풍화토 구간이 터널 하부까지 증가(기본설계 대비 약 4m 깊어짐)되어 터널 안정성 확보를 위해 종점부 약 79m에 대해 추가 보강공법 등 재검토

기본설계	실시설계
< 지반조사 결과 >

【 실시설계적격자 조치계획 】

*******************************************************************************

********************************************************

*********************************************************

4		검토결과

□ 터널 작업구 및 집수정 위치 변경

**************************************************************************************************

**********************************************************************

□ 종점부 지반조건 변경에 따른 터널공법 변경

*************************************************************************************************

*************

***************************************

***********************************************************************

5		향후계획

□ 실시설계 변경 승인(공사비 조정 없음)

o 터널 작업구 및 집수정 위치 변경, 종점부 터널공법 변경 건에 대해 실시설계적격자가 제시한 조치계획에 따라 실시설계 변경 승인코자 함.

***************************************************************************************************

************

******************************************************

**************************************************

붙임  1. 작업구(집수정) 위치 및 공기 검토 자료 1부.

2. 종점부 터널 보강공법 비교 검토 자료 1부.

3. 건설사업관리단 회의록 1부.  끝.