문서번호	건축부-25739
결재일자	2022. 7. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	의료시설과장	건축부장
김완선	정채문	07/01
		신명승

「광역소공인 특화지원센터 건립공사(2차)」

아연도 골강판 설치 관련 실정보고 검토보고

2022. 6.

도시기반시설본부

[ 건 축 부 ]

(건축부)

「광역소공인 특화지원센터 건립공사(2차)」

아연도 골강판 설치 관련 실정보고 검토보고

『광역소공인 특화지원센터 건립공사』관련하여, 건설사업관리단으로부터 외벽 마감부의 아연도 골강판 설치에 관한 실정보고가 제출되어 적정성을 검토 및 보고드림.

1		관 련 근 거

○「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」제97조(설계변경 등)

○「공사계약 일반조건」제19조의2 (설계서의 불분명·누락·오류 및 설계서간의 상호모순 등에 의한 설계변경)

○ 아연도 골강판 설치 관련 실정보고 [광역CM-344호(2022.6.29.)]

2		공 사 개 요

○ 공 사 명 : 광역소공인 특화지원센터 건립공사(장기2차)

○ 위    치 : 서울시 성동구 아차산로17길 9 (성수동2가 277-34)

○ 규    모 : 지하2층~지상7층, 연면적 2,711㎡

○ 공사기간 : 2020. 6. 30. ~ 2022. 9. 6.

○ ***********************

○ 시 공 사 : 세이브건설㈜, 이레비앤디㈜, ㈜블루트리이엔지

○ 감 리 사 : ㈜포스코에이앤씨건축사사무소, ㈜비전이엔지기술사사무소

○ 차수별 계약현황

구 분	도급금액 (원/VAT포함)	계 약 기 간	비 고
***	*************	*************************
***	*************	*************************	***
***	*************	*************************	***

3		추 진 경 과

○ '20. 06. 30.: 공사 착공

○ '22. 03. 17.: 총차 및 2차 계약변경(공사기간 연장)

○ '22. 06. 29.: 아연도 골강판 설치 관련 실정보고(건설사업관리단 → 건축부)

○ '22. 06.(현재): 외부계단 골조공사 및 기계식주차장 공사 등

4		실정보고 검토내용

○ 실정보고 사유

- 설계서의 불분명·누락·오류 및 설계서간의 상호모순 등에 의한 설계변경

○ ***********************

- 설계도면과 공사설계설명서는 서로 일치하나 물량내역서와 상이한 경우에는 설계도면과 공사설계설명서에 물량내역서를 일치시킨다.

품 명	*****		****	*** *******
	****	***
아연도 불소수지 골강판	************	*******	***********	************** ***************
	****	****	*******	************** ***************
	***************	****	*********	************* ***************

○******************************

- ***************************

품 명	앵 글 규 격		비 고
	변경 전	변경 후
아연도 불소수지 골강판	*****************	****************

5		실정보고 공사비 변경

구 분	공 사 비			비 고
	변경 전	변경 후	증·감
*****	**********	***********	**************
*****	**********	**********	**************
****	**********	***********	***************
*****	*********	**********	**************
******	**********	***********	***************

○ 실정보고사항 총변경금액 ****************

① 기존비목 단가: *******

② 신규비목 단가: **************

- ******************************

※ ***************************************** ******************************************

6		건설사업관리단 검토의견

○ ************************************ ************************************** **************************************

7		설계사 검토의견

○ ***********************************

○ **************************

○ **************************************

8		처 리 의 견

○ ************************************************************************************************************

붙임 : 실정보고 1부.  끝.