문서번호	도시철도계획부-23134
결재일자	2022. 7. 1.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관	경전철설계과장	도시철도계획부장
김용태	代장기철	07/01
		정대현

“위례선 도시철도 건설사업 환경영향평가용역”

설계변경(정산) 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 7.

도시철도계획부

“위례선 도시철도 건설사업 환경영향평가용역”

설계변경(정산) 검토 보고

“위례선 도시철도 건설사업 환경영향평가용역”과 관련하여, 주민설명회 대관료 반영·실조사항목 등 직접경비 정산을 위한 설계변경 내용을 검토 보고 드림

1		용역개요

□ 용 역 명 : 위례선 도시철도 건설사업 환경영향평가용역

□ 용역기간 :‘21.6.21.~‘22.9.18.

□ 용역금액 : 금554,304천원

□ 용 역 사 : ㈜홍익기술단, ㈜소운이엔씨, ㈜천일 [공동도급]

□ 과업내용 : 환경영향평가서 작성, 관계기관 협의 등

2		추진경과

□	'22.	6.	21.	:	용역 착수
□	'22.	10.	8.	:	평가항목 결정내용 공람
□	'22.	11.	5.	:	환경영향평가(초안) 공람
□	'22.	11.	24.	:	주민설명회 개최(3회, 하남시·성남시·송파구)
□	'22.	2.	14.	:	공청회 개최
□	'22.	4.	13.	:	주민 등의 의견수렴 결과 및 반영여부 공개
□	'22.	5.	3.	:	평가서(본안) 제출(서울시→대광위)
□	'22.	6.	15.	:	평가서 협의내용 통보(대광위→서울시)

3		설계변경 보고

□ 설계변경 내용

○ 주민설명회 장소대관 비용 반영(신규)

− 당초 도급내역에 없는 주민설명회 장소대관 비용을 신규대가로 반영

· 주민설명회 개최(3회)

일 시	장 소	참석인원
‘21.11.24(수) 10시	밀리토리아 호텔	송파구 위례동, 거여2동, 마천1동 등 주민 51명
‘21.11.25(목) 10시	밀리토리아 호텔	성남시 등 주민 24명
‘21.11.25(목) 14시	밀리토리아 호텔	하남시 등 주민 17명

− 장소대관 비용 : 증 2,527,273원(직접경비 항목, 부가세 제외)

○ 환경분야 실측정 수량 정산

− 당초 도급내역에 포함된 측정경비 중 중요도가 낮아 제외한 항목을 실정산

· 실정산 내역 : 감 2,400,426원(직접경비 항목, 부가세 제외)

측정항목	규 격	단위	수 량
			당초	변경	증감
전파장해		건	4	2	△2
측정현장경비(수질,토양)	지하수·토양·전파 각2회, 각2지점	회	12	10	△2

□ 설계변경 검토

○ 총용역비 한도내에서 용역비 변경없이 증감 내역 반영

− 정산감액 금액보다 신규 반영금액이 크나, 총용역비 한도 내에서 정산처리 하는 것으로 환경영향평가 주민설명회 계획 수립시 해당 내용 보고(용역사 동의)

※ 관련근거 : 환경영향평가 추진계획 보고 [도시철도계획부-8505호(’21.10.21)]

- 주민설명회 대여장소 비용은 환경분야 세부항목 중 중요도가 낮은 항목비 일부를 전용하여 집행(총용역비 변경 없음)

○ 설계변경 내역                                                (단위 :원)

구 분		당 초	변 경	증·감
총용역비		554,304,000	554,304,000	-
도급비	공급가액	500,185,455	500,185,455	-
	부가가치세	50,018,545	50,018,545	-
	용역손해보험공제료	4,100,000	4,100,000	-

4		조치계획

□ 설계내역 변경에 따른 변경계약 시행

○ 용역 계약금액은 동일하나 계약문서인 설계내역서의 변동사항이 있어 이에 대한 반영을 위해 변경계약을 시행하고자 함

− 당초 도급내역에 없는 주민설명회 장소대관 비용을 신규대가로 반영

□ 변경계약 이후 준공처리

○ 환경영향평가서 본안에 대한 협의가 완료되어 과업내용서 전체내용이 이행 완료되었는 바, 성과품을 수령 후 용역 준공처리 하고자 함

− 협의완료 : 대도시권광역교통위원회(광역시설정책과-565호, '22.6.15)

※ 설계변경 사항 이외에 실정산 항목에 해당하는 출장비에 대하여 확인 결과 도급내역을 상회하므로 적정함(도급내역 40회, 출장결과 48회)

붙임 1. 설계변경내역서 1부.

2. 설계변경내용 당초 보고서 1부.

3. 주민설명회 장소대관료 증빙자료 1부.

4. 출장내역 증빙자료 1부.  끝.