문서번호	전산정보과-23021
결재일자	2022. 7. 1.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		전산정보과장	요금관리부장
이원복		한재훈	07/01
			안병희
협조

상수도 데이터 활용 정보전략계획(ISP) 수립 용역

추진현황 보고(6월)

2022. 7.

상수도사업본부

(요금관리부)

상수도 데이터 활용 정보전략계획(ISP) 수립 용역

추진현황 보고(6월)

상수도 데이터 활용 정보전략계획(ISP) 수립 용역 6월 추진실적 및 차월 계획을 보고드림

□ 사업개요

ㅇ 사 업 명 : 상수도 데이터 활용 정보전략계획(ISP) 수립 용역

ㅇ 사업기간 : ’22. 4.27. ~ 10.26.(6개월)

ㅇ 계약업체 : ㈜씨에이에스

ㅇ 계약금액 : 222,432천원

ㅇ 사업내용

- 상수도 데이터 활용 비전·전략 수립을 위한 환경 분석, 현황 분석 및 진단

- 데이터 통합관리 체계 및 활용방안 수립, 세부 이행계획 및 관리방안 제시

□ '22. 6월 추진실적

ㅇ 환경분석

- 내외부 환경 분석, 선진사례 분석 : 시사점 보완

- SWOT 분석 : SWOT Factor, SWOT Matrix 전략 도출

* SWOT 분석이란 내부요인 강점(strength), 약점(weakness)과 외부요인 기회(opportunity), 위기(threat)를 열거하여 효과적인 전략을 수립하기 위한 분석방법으로, 주로 강점과 기회(SO)분석, 강점과 위기(ST)분석, 약점과 기회(WO)분석, 약점과 위기(WT)분석의 네가지 방법으로 분석한다.

ㅇ 현황분석

- 데이터 업무/정보시스템, 데이터 영역 분석 산출물 작성

- 과제 후보 Pool 도출

- 이해관계자 분석

□ '22. 7월 추진계획

ㅇ 분석단계 산출물 검토(~ 7.15.)

- 내외부 환경분석 및 데이터/플랫폼 활용 사례 분석

- 데이터 업무, 정보시스템, 데이터 현황, 인프라 현황분석

- 설문 및 인터뷰 분석

ㅇ 비전체계 및 추진전략 수립(~ 7.15.)

- SWOT 분석 보완 및 핵심성공요소 도출

- 데이터 활용 서비스 포함, 목표모델 설계 대상 과제 정의

- 비전 키워드 도출, 정보화 비전(안), 추진 전략 및 과제, 비전체계

ㅇ 영역별 목표모델 설계(7.18. ~ 9.16.)

- 서비스 시스템 구축 방안

- 데이터 플랫폼 구축 방안

- 통합 표준 데이터 관리체계

- 데이터 공동활용 DB화 방안

ㅇ 사업관리

- 분석단계 중간 산출물 검토 TF 회의 : 7.11 ~ 7.15. 예정

- 중간보고 : 7.25. ~ 7.25. 예정

붙임 1. 월간보고서 1부.

2. 작업분류체계(WBS) 1부.