투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	서울특별시감사위원회(안전감사담당관)
(경유)
제목	하도급 부조리 신고사항 처리기한 연장 요청

****************************************************

**』하도급 부조리 신고사항 처리기한을 연장요청 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

가. 처리기한 연장사유

○ 공사관계자 미팅일정 지연

- 최초 : `22.06.17(금) 16:00 → 하도급사 요청으로 6.20(월) 조정

- 1 차 : 원도급사 요청으로 6.22(화) 조정

- 2 차 : 하도급사 요청으로 6.23(수) 조정

- 3 차 : 하도급사 요청으로 6.24(금) 조정

- '22.06.24(금) 16:00 회의 개최 ※서명부 참조

○ 원도급사 및 감리단 검토기한 필요

- 하도급사 요청에 따라 추가공사비 산출근거자료를 원도급사와, 감리단에 미제공

하였으며 하도급사 자료에 대한 원도급사와 감리단 검토(법률자문 등) 및 발주

부서 제출자료 작성 기한 필요

※회의 당일 출력물로 제공하였으며 정식 공문으로 자료제공 및 검토자료 제출 요구 예정

나. 처리기한 연장 요청

- 당초 `22.06.24(금) → 변경 `22.07.29(금)

붙 임 : 회의참석자 서명부(`22.6.24.) 1부. 끝.

	서울특별시도시기반시설본부장
주무관	이회진		교량건설과장	황윤기		토목부장	07/04
하현석
협조자
시행	토목부-26280	(	2022.07.04	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8 (무교동)	/	http://seoul.go.kr
전화	02-3708-2576	/전송	02-3708-2599	/	colaten@seoul.go.kr	/	부분공개(5,6)