투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	남부도로사업소
수신	서울주택도시공사 사장
(경유)
제목	선암제설기지 부지반환 연기 알림

1. 귀 기관의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 도시개발계획부-2141(2021.6.25.)호 및 도시개발계획부-1232(2022.4.14.)호와 관련, 우리 사업소에서 일부 점용하고 있는 우면2지구 부지 반환을 위한 공사를 시행하고 있습니다.

3. 그러나 현재 시행 중인 공사의 지연으로 2022년 상반기에 부지 반환이 시기적으로 불가능한 바 붙임과 같이 반환 시기를 연기하고자 하오니 업무에 참고하여 주시기 바랍니다.(2022년 9월 말 준공 후 반환 예정)

붙임 : 선암청사 방음벽 설치공사 준공기한 연기 검토 방침 1부.  끝.

	서울특별시 남부도로사업소장
주무관	김진경		주무관	김영화		관리단속과장	전결 07/04
석대창
협조자
시행	관리단속과-24078	(	2022.07.04	)	접수		(		)
우	07415	서울특별시 영등포구 도림로 145, 2층 관리단속과	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-3284-5419	/전송	02-841-6458	/	kjkarcade123@seoul.go.kr	/	부분공개(5)