문서번호	토목부-26254
결재일자	2022. 7. 4.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	교량건설과장	토목부장
이승주	황윤기	07/04
		하현석

물가변동으로 인한 계약금액 조정(제6회) 검토보고 [신림공영차고지(저류조포함) 조성공사]

2022. 7.

도시기반시설본부

(토    목    부)

- 신림공영차고지(저류조포함) 조성공사 -

물가변동으로 인한 계약금액 조정(제6회) 검토보고

『신림공영차고지(저류조포함) 조성공사』의 계약상대자로부터 물가변동으로 인한 계약금액 조정(6회) 요청이 있어 이에 대한 검토보고임

Ⅰ		관 련 근 거

□ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제22조

□ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제13장 공사계약일반조건

□ 물가변동으로 인한 계약금액 조정(6회) 검토보고(신림차고지(감)제2022-149, '22.06.30.)

Ⅱ		사 업 개 요

□ 공 사 명 : 신림공영차고지(저류조포함) 조성공사

□ 규    모 : 주차장(버스 101대), 빗물저류조(35,000㎥)

□ 기    간 : 2018.10.01. ~ 2023.12.31.(4차 '22.1.1.~12.31.)

□ 도 급 비 : 35,125백만원(4차 5,000백만원)

□ 시 공 사 : 삼영종합건설㈜ 외 2개사 / 감 리 단 : (주)제일엔지니어링 외 2개사

Ⅲ		검 토 내 용

□ 물가변동으로 인한 계약금액 조정 대상여부 : 대 상

○ 직전조정일로부터 90일 이상 경과

○ 직전조정일을 기준으로 산출 지수조정률이 100분의 3이상 증·감된 경우

구 분	검 토 항 목		검 토 내 용	결 과	비고
조정방법	계약서 명기사항 확인		지수조정율 적용	적 합
적용요건	①물가변동 경과기간	기준시점으로부터 90일 이상 경과	119일 경과 -기준시점 : 2022.01.01. -비교시점 : 2022.05.01.	적 합
	②물가변동 조정율	3/100 이상 증감	조정율 : 3.26% ≥ 3.00%	적 합
	③조정기준일 (비교시점)	①,② 동시 충족 되는 최초의 날	조정기준일 : 2022.05.01. (비교시점)	적 합
	④직하시점	조정율 3% 미만	2022.04.30.기준 조정율 : 2.15% < 3.00%	적 합

□ 물가변동 대상금액 검토

(단위 : 백만원, %)

***	**** ***	**** ***	**** ***	**** ***********	**** ***	*** **** *********	**** ***	**** *************	**** *******
***	******	*****	*****	******	****	******	*****	******	******
***	***	*****	*****	*****	****	*****	*****	*****	*****

****************************************

******************************************

□ 물가변동 조정(6회) 결과

******		*******	****
*****************	****	***************	****
	*****	************	*******************
	**	***************
***************	****	***************
	*****	**********	***********************
	**	***************
************	****	***************	*****************
	*****	************	********************
	**	***************
*******		*****
******************		************	*********
***********		**
**************		************	*****

******************************************************************

Ⅳ		조 치 의 견

□ 물가변동으로 인한 계약금액 조정 요청 건에 대하여 관련 규정 등을 검토한 결과, 시공사 요청 및 책임건설사업관리기술인 검토의견이 타당한 것으로 판단되므로 승인 조치하고 추후 설계변경시 반영하고자 함.

붙임  물가변동으로 인한 계약금액 조정 검토의견서(보고서) 1부.  끝.