문서번호	토목부-26332
결재일자	2022. 7. 5.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	교량건설과장	토목부장
이승주	황윤기	07/05
		하현석

실정보고(한가람로 교통조사) 검토 보고

[올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사]

2022. 7.

도시기반시설본부

(토    목    부)

- 올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사 -

실정보고(한가람로 교통조사) 검토 보고

『올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사』 한가람로 진입램프 교통안전심의 관련 송파경찰서 협의사항 반영을 위한 한가람로 교통조사(분석) 추진 검토보고임

Ⅰ		관 련 근 거

○ 실정보고(한가람로 진입램프 교통안전 재심의을 위한 관계기관 요청사항 설계반영)        [올대감22-117호, '22.06.30.)]

Ⅱ		사 업 개 요

○ 공 사 명 : 올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사

○ 위    치 : 송파구 풍납동 일원

○ 규    모 : 램프신설 L=1,600m(교량 L=446m) / 램프이설 L=1,309m(교량 L=139m)

○ 기    간 : 2016.04.01. ~ 2022.12.31.(7차 '22.5.10.~22.12.31.)

○ 사 업 비 : 56,399백만원(7차 7,225백만원)

○ 시 공 사 : 대보건설(주) 외 2개사 / 감 리 단 : (주)이산 외 2개사

Ⅲ		추 진 경 위

○ ‘16.04.   : 공사 착수

○ ‘18.11./'19.3. : 진정민원********************

○ ‘19. 6.   : 사업계획 변경(도로계획과-7896)

○ ‘20.9.~'21.1. : 보완설계 및 한가람로 공사추진

○ ‘21. 8.   : 한가람로 진입램프 (회전)교차로 교통안전심의 '부결'

****************************************

○ '21. 9.~10. : 교차로 형식 변경 협의(송파구 교통과)

○ ‘21.11.   : 교통안전재심의 협의(송파경찰서)

***************************

○ ‘22. 6.  : 한가람로 좌회전 교차로 재심의 관련 합동회의

*************************************************************

Ⅳ		검 토 내 용

□ 실정보고 검토

○ 합동회의 내용 : 재심의(안) 및 송파경찰서 의견

****	*******
******	******************** **************************** ******************* ********************* ************************* ****************************
***** ********	*************************************************** ******************************************************* *****************************************************

○ 교통조사 용역 추진계획

***	********	********
****	***********	***********
****	***********	*******************
****	**********************	*************************

<조사 위치도(안)>

***************************************

□ 공사비 검토

○ 교통조사 용역비

- 3개 조사 업체가 제출한 견적 중 최저가로 산출하되 신규비목이므로 협의율 적용

****	***			**** *******
	**	**	**
******	**********	**********	**********	**********
**	*			************

********************

******	******	**	**
**********	*************	**********	*************

***************************************************

**********************************************

**********************************************************

○ 공사비 증·감 현황

공 종	규 격	단위	수 량			금 액(천원)
			당초	변경	증·감	당초	변경	증·감
<********>
************	*****	*		*	*		******	******
****							******	******
*****							*****	*****
*****							******	******

○ 예산조치 계획

**********************************

Ⅴ		조 치 의 견

○ 한가람로 진입램프 교통안전심의에 따른 관계기관(송파경찰서) 협의(요청) 관련 한가람로의 교통량 분산효과에 대한 적정성을 확보하기 위한 교통량 조사 용역을 시행하는 사항으로 책임건설사업관리기술인의 검토의견이 타당한 것으로 판단되므로 실정보고를 승인하고 추후 설계변경시 반영하고자 함.

붙임  실정보고서 1부.  끝.