문서번호	도로계획과-24383
결재일자	2022. 7. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	간선도로계획팀장	도로계획과장	안전총괄관		안전총괄실장
이주영	김서연	임창수	백일헌		07/06
					代백일헌
협 조
	예산1팀장			신애선

「디지털3단지 ~ 두산길간 지하차도 건설공사」

예산변경(통계목) 및 집행계획 보고

2022. 7.

안전총괄실

(도로계획과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

「디지털3단지 ~ 두산길간 지하차도 건설공사」

예산변경(통계목) 및 집행계획 보고

「디지털3단지~두산길간 지하차도 건설공사」와 관련, 공사감리비 확보 및 효율적인 예산사용을 위해 예산변경(시설비→감리비) 하고자 함

□ 사업개요

ㅇ 사 업 명 : 디지털3단지~두산길 간 지하차도 건설공사

ㅇ 위    치 : 금천구 가산디지털1로42 ~ 금천구 두산로 20

ㅇ 규    모 : 도로개설 2~4차로 452m(지하차도 290m+접속도로 162m)

ㅇ 사업기간 : 2012.12. ~ 2024.05.

ㅇ 총사업비 : 68,457백만원

□ 주요 추진현황

ㅇ ’17.12.26. : 공사착공

ㅇ ’19.08.21. : 손실보상 완료(교학사)

ㅇ ’19.11.11. : 공사중지

ㅇ ’20.01.31. : 명도소송(토지인도 등) 제기(서울시 → ㈜교학사)

ㅇ ’21.09.09. : 대법원 판결(서울시 승소)

************************************************

************************************

〈연차별 투자계획(당초)〉

(단위: 백만 원)

구 분	총사업비	기 투 자	2021년	2022년	2023년 이후
*	******	******	*	*****	******
*******	*****	*****	*	*	*
*****	******	******	*	*	*
*******	******	*****	*	*****	******
*******	*****	***	*	*	*****

□ 예산변경 사유

ㅇ ***************(’22.03. ~ ’22.07.)

- *************를 위해「건축물 관리법 제30조」 및「서울시 건축조례 제7조」에 의거, ***************************************에 있으며, 심의자료 작성, 조치사항의 적정성 검토 및 안전을 위한 전문 감리기술자 필요

********************

********************************

******************************************

*************************************

ㅇ ************(’22.09. ~ ’22.12.)

- *****************************************************************************

- *********************************************

□ **************************************************

※ 공사감리(건설사업관리) 용역발주를 위해 206백만원 예산변경(시설비 → 감리비)

***********************************

□ 조치계획

ㅇ 원활한 사업추진을 위해 금년도 시설비 중 206백만원을 통계목 조정(시설비→감리비)하여 감리비 예산 집행

※ *********************************************************************************************************************************

〈예산 변경 내역>

(단위: 백만 원)

예 산 과 목				예 산 현 액
정책	단위	세부	통계목	변경전	변경후	증·감
** **	**** ****** ***** *****	****** *************	*	*****	*****	*
			***	*****	*****	****
			***	*	***	****

붙임 : 1. 예산변경 요청공문(도기본) 1부.

2. 건설사업관리 용역비 산출근거 1부.  끝.