문서번호	도심권사업과-23164
결재일자	2022. 7. 6.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	다시세운관리팀장	도심권사업과장	균형발전기획관		균형발전본부장
조한근	최현	이상면	김승원		07/06
					여장권
협 조
	예산담당관			김재진
	건축부장			신명승

「세운상가군 공공공간 조성공사(2단계)」 관련

추가공사 및 예산전용 검토 보고

2022. 7.

균형발전본부

(도심권사업과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

「세운상가군 공공공간 조성공사(2단계)」 관련

추가공사 및 예산전용 검토보고

「세운2단계 공공공간 조성공사」준공 시설물의 인수인계 관련 재산관리부서요청사항 조치 등을 위한 추가 공사비 예산 확보계획(예산전용)을 보고드림

Ⅰ		사업현황

□ 공사 개요

○ 공 사 명 : 세운상가군 공공공간 조성공사(2단계)

○ 위    치 : 중구 을지로 ~ 세운상가군(삼풍상가~진양상가) ~ 퇴계로

**********************************

****************

○ 사업내용 : 보행데크 신설·정비, 공중보행교(2개소), 을지로지하도 연결통로(2개소), 큐브셀 등 거점공간 조성

□ 추진 경과

○ '18. 9.10. : 공사 착공

○ '21. 2.18. : 연결통로A(을지로지하~대림상가) 우선 개통  ※ '21.4.28. 이관 완료

**************************************************************

*****************************************************************************

*******************************************************************************************************************

************************************************

*****************************************************

*****************************************************

***********************************************

*******************************************************

Ⅱ		추가공사 검토

□ 추가공사 사유

○ 공사 사유

- '세운2단계 공공공간 조성공사' 준공에 따른 시설물 인수인계 관련 재산관리부서(기관) 요청사항 조치를 위한 추가 공사 필요

*************************

******************************************

***************************************************

*************************************************

*********************************************************************************************************************************************************************************************************************

*************************

****************************************

**********************************************************************************

*********************************************************************************

********************************************************************************

******************************************

*************************************************************

Ⅲ		예산전용

□ 전용사유

○ 세운2단계 조성공사 시설물의 인수인계를 위해 재산관리부서(기관)에서 요청한 추가공사 이행을 위한 공사비 예산 확보 필요

**********************)

*******

**********************************************************************************************************************************************************************************************************************************

***********************************

□ 예산전용 계획

********************

***********

******************************************************************************

************************************************************

***********

*********

*****************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

※ 방침 수립 이후 예산전용 승인요청(예산담당관)

Ⅳ		행정사항

○ 예산 전용 요구서 통지(⇒ 예산담당관)

○ 예산 재배정 및 공사시행(⇒ 도기본 건축부)

붙임  1. 예산전용 요구(통지)서 1부.

2. 관련 공문서 1부.  끝.