“아리수는 오늘도 당신의 삶과 함께 합니다!”
	상수도사업본부
수신	수신자 참조
(경유)
제목	암사정수센터 안전시설 보강에 따른 추가 정비예산 활용방안 검토결과 통보

1. 암사정수센터 정수시설과-23349('22.7.5)호와 관련입니다.

2. '22년 정수센터시설정비 사업으로 추진중인 "암사정수센터 석면 해체제거공사" 시행과

관련 추가예산 배정 요청에 대하여 아래와 같이 검토하고 예산 활용 방안을 통보하오니

관련 사업의 안전관리 등 사업 시행에 철저를 기하여 주시기바랍니다.

※ 기획예산과는 예산운영관리에 참고하시기 바랍니다.

○ 추가예산 배정요청 사유

- 개요 : (사업명) '22년 암사정수센터 석면제거 공사 (사업예산) 300백만원 (추가요청) 60백만원

- 추가 예산요청 사유 : 작업자 안전시설 강화로 전면 비계 설치필요 사업비증가 (개구부 등 안전시설 강화)

※ 근거 : 감리실정보고서 검토를 통한 안전시설 보강필요

○ 검토결과

- 건물 천정 및 상부는 고소작업으로 당초 호이스트 활용 석면제거로 설계하였으나 작업자 추락 등의        사고 위험으로 감리 검토 의견 "강관비계 설치를 통한 안전확보" 반영 타당

○ 추가 예산 활용방안

- 추가 소요예산 60백만원 자체 집행잔액 활용 정비시행 (예산비목) 구축물, 정수센터시설정비, 시설비

- 부족예산 활용 : 자체 정수센터 시설정비, 시설비 집행잔액 활용정비 (발주잔액, 낙찰차액, 미집행잔액)

※ '22.7.8현재 발주잔액 402백만원, 낙찰차액 3,517백만원 및 발주취소 예산 등 집행잔액 적극활용

첨부 : 암사정수센터 추가예산 재배정요청 관련 서류 끝.

	서울특별시상수도사업본부장
수신자	암사아리수정수센터소장, 기획예산과장
주무관	이규현		생산관리과장	백광인		생산부장	07/08
김창중
협조자
시행	생산관리과-23365	(	2022.07.08	)	접수		(		)
우	03741	서울특별시 서대문구 서소문로 51, 상수도사업본부 3층 생산부	/	http://arisu.seoul.go.kr
전화	02-3146-1311	/전송	02-3146-1319	/	bolhert@seou.go.kr	/	부분공개(5,7)