문서번호	도시철도사업부-23970
결재일자	2022. 7. 11.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		공정관리과장	도시철도사업부장
박중모		최문기	07/11
			代최문기
협 조
	주무관			김동일

- 동북선 도시철도 민간투자사업(4공구) -

114E환기구 덕트 위치변경 검토 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 7.

도시기반시설본부

(도시철도사업부)

- 동북선 도시철도 민간투자사업(4공구) -

114E환기구 덕트 위치변경 검토 보고

동북선 민간투자사업 건설공사(4공구)와 관련, 사업시행자로부터 114E환기구 덕트 위치변경 승인 요청에 대한 검토 보고임

※ 관련근거 : 동북선 도시철도(주) 건관-22-0598호('22.7.6.)

□ 공사개요(동북선4공구)

❍ 규    모 : 연장 1,572m(은행사거리~상계역), 정거장3개소, 차량기지 1개소

❍ 공사비 및 기간 : *******(불변가), '21. 7. ~ '26. 7.

□ 변경내용

ㅇ 변경위치 및 사유

구 분	위 치	사 유
환기구 덕트 (114E 배기)	***************** ·******************** ·****************	******************** ************************** *****************************

ㅇ 변경현황

구 분	당 초	변 경
현황도
구조물도
규 모	***************** ***********	***************** ***********

□ 추진경위

ㅇ '21. 6. 3. : 위치 변경 검토의견 제출(사업시행자 → 주무관청)

ㅇ '21. 6. 4. : 위치 변경 검토의견 회신(주무관청 → 사업시행자)

ㅇ '21. 6.~10. : 관련 기관 협의(도기본 도시철도 설비부, 노원구청 등)

□ 관련기관 및 사업시행자 검토내용

ㅇ 설계 검토결과

구 분	분 야	의 견
도시기반시설본부 ('21. 6.)	설비(도시철도설비부)	******************************************************* *****************************
노원구청 ('21. 9.)	토목(토목과)	************** ***************
원설계자 ('22. 6.)	토목(동명기술공단)	*******************
	설비(남진설비)	******************* *************************
	기계설비(신우디엔시)	********************** **********************
기술지원기술인 ('22. 6.)	구조, 토질 및 지질	********** **************************

ㅇ 총사업비 검토

- 사업비 증·감 현황                              (단위 : 백만원)

구 분	당 초	변 경	증·감
소계	******	******	******
공사비등	******	******	****
보상비	****	*	****

- 책임건설사업관리단 및 사업시행자

·협약 제13조(총사업비의 변경)에 따른 ************

·설계변경에 따른 사업비 *******************

□ 검토의견

**************************************************************************************************************

*****************************************************************************************

□ 조치계획

❍ 상기 검토의견과 같이 사업시행자에게 회신코자 함.

붙임 : 사업시행자 관련문서 등 1부.  끝.