투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	변경계약 체결 보고(토건시설물 정비공사 연간단가)

1. 시설과-22686호(2022. 7. 4.)와 관련됩니다.

2. 위 호와 관련하여 다음과 같이 변경계약이 체결되었음을 보고합니다.

가. 건명: 2022년 토건시설물 정비공사(연간단가)

*****************************

다. 계약금액: 금265,807,730원(금이억육천오백팔십만칠천칠백삼십원)

라. 공사기간: 2022. 3. 22.~ 2022. 12. 31.

마. 변경내용: 내역서 변경(금액변경 없음)

○ 원형사각수로관 부설: 56본 신규공종 추가

○ 석재판붙임: 168.1㎡ 신규공종 추가

○ 소규모 포장복구: 5a → 0.55a 감액

○ 잡철물 제작설치: 2톤 → 0.01톤 감액

붙임  공사계약서류 각 1부.  끝.

주무관	김호영		재무팀장	양근대		공원운영과장	류기혁		서부공원녹지사업소장	07/11
이용남
협조자
시행	공원운영과-26163	(	2022.07.11	)	접수		(		)
우	03901	서울특별시 마포구 월드컵로, 243-60	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	02-300-5512	/전송	02-300-5527	/	sky500611@seoul.go.kr	/	부분공개(6)