투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시도시기반시설본부
수신	총무부장
(경유)
제목	납품기한 연기요청[별내선(8호선연장)정보통신공사 케이블트레이(관급자재)]

별내선(8호선연장) 정보통신공사 케이블트레이(관급자재)에 대하여 아래와 같이 납품기한 연기를 요청하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

1. 계약개요

○ 계 약 명: 별내선(8호선연장) 정보통신공사 케이블트레이 구매

○ 계 약 자: (주) 태화이엔지(대표자: 이재필)

○ 납품기한: 2021.4.7. ~ 2022.8.16.

○ 계약금액: 598,722,960원

○ 납품요구번호: 12-21-1-38055-01

2. 납품기한 연기

구분	납품기한연기		비고
	당초	변경
별내선(8호선연장) 정보통신공사 케이블트레이 구매	2021.04.07. ~ 2022.08.16.	2021.04.07. ~ 2022.9.15.	증 30일

※ 납품물품 및 계약금액 변경없음

○ 변경사유: 선행공정(토목 3공구) 지연으로 기한연장

○ 지체상금 부과여부: 미부과

붙임  1. 별내선(8호선연장) 정보통신공사 케이블 트레이(관급자재) 납품기한 연기 검토 보고 1부.

2. 별내선(8호선연장) 정보통신공사 케이블트레이 구매 계약변경 보고 1부.

3. 별내선 3공구 선행(토목) 공정 추진 개황 1부.  끝.

	도시철도설비부장
주무관	김태연		정보통신과장	김이곤		도시철도설비부장	07/12
김중영
협조자
시행	도시철도설비부-23846	(	2022.07.12	)	접수		(		)
우	04520	서울특별시 중구 청계천로 8, 프리미어플레이스 빌딩 8층 도시철도설비부 정보통신과	/	http://infra.seoul.go.kr
전화	02-772-7320	/전송	02-772-7308	/	seoultt@seouol.go.kr	/	부분공개(5)