	서 울 기 록 원
수신
(경유)
제목	용역변경계약체결 보고(보안사무실 및 휴게실 환경개선 공사_정보통신)

1. 운영지원과-22304(2022.7.5.)호와 관련입니다.

2. 위 호와 관련하여 우리 부서 소관 공사에 대하여 아래와 같이 변경계약을 체결하였음을 보고합니다.

가. 건    명 : 서울기록원 보안사무실 및 휴게실 환경개선 공사_정보통신

나. 변경사항 : 계약기간 변경

- 변경 전 완수일자 : 2022.7.7.

- 변경 후 완수일자 : 2022.8.5.

다. 변경사유 : 본 공사와 연계되는 타 공정(보안사무실 및 휴게실 환경개선 공사_건축) 일정을 반영하여 준공기한 연장

라. 변경계약일자 : 2022.7.7.

붙 임 : 공사변경계약서 1부.  끝.

주무관	주서진		운영지원과장	07/12
김필래
협조자	주무관	김병섭
시행	운영지원과-22482	(	2022.07.12	)	접수		(		)
우	03371	서울특별시 은평구 통일로62길 7, 서울기록원	/	https://archives.seoul.go.kr
전화	02-350-5632	/전송	02-350-5605	/	joosj82@seoul.go.kr	/	부분공개(7)