문서번호	공원운영과-26352
결재일자	2022. 7. 13.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관	경의선숲길공원장	공원운영과장	서부공원녹지사업소장
유하현	이용한	류기혁	07/13
			이용남
협 조

2022. 경의선숲길공원 정비사업 설계변경 검토보고

2022.  7.

서부공원녹지사업소

공원운영과(경의선숲길공원) -

2022. 경의선숲길공원 정비사업 설계변경 검토보고

「2022. 경의선숲길공원 정비사업」시행 중 현장여건 및 추가 식재 물량 증가 등에 따라 설계 변경사항이 발생하여 보고드림

□ 공사개요

ㅇ 공 사 명 : 2022. 경의선숲길공원 정비사업

ㅇ 위    치 : 경의선숲길공원 연남 ~ 원효구간

ㅇ 공사기간 : 2022. 05. 25. ~ 07. 27.

ㅇ 공사내용 : 식재공사, 시설물 및 포장공사, 기타 부대공사

ㅇ 공 사 비 : *************

ㅇ 도 급 자 : ******************

□ 설계변경 검토내용

구 분	설계변경내용		비 고
	검토사항	변경내용
식재공	• 원효구간내 지피식물이 없는 나대지에 공원 미관상 잔디식재 필요	• 잔디 식재물량 증 반영 : 10.7㎡ → 70.0㎡	[원효]전화민원 '22.7.1 ,7.4. 2회
	• 새창구간 백범교 옆 녹지활영계약 지역 내 위험수목(소나무)제거지 보완식재	• 소나무(장송 H6*W3.0*R30) 증 반영 : 0주 → 1주	조치보고 공원운영과-26087 ('22.7.8.)
	• 대흥 및 신수구간 상가측 공원경계녹지대에 보행자 출입으로 인한 훼손 방지를 위한 경계식재 반영	• 관목 식재물량 증 반영 - 병꽃나무(H1.2*W0.6) 0주 → 80주 - 황매화(H1.2*W0.6) 30주 → 50주 - 병꽃나무(H1.2*W0.6) 0주 → 40주	실정보고 공원운영과-26127 ('22.7.11.)
	• 연남구간 녹지 나대지(기존 잔디밭)가 발생되어 공원 미관상 잔디 추가식재 필요	• 잔디 식재물량 증 반영 : 150㎡ → 200㎡

구 분	설계변경내용		비 고
	검토사항	변경내용
시설물 및 포장공사	• 침목설치 6개소에 엘브엣지(L형) 설치 후 침목 사이에 단차가 발생하여 발빠짐 사고 예방을 위한 흙채움 필요	• 마사토 포설 물량 증 반영 : 8.1㎡ → 13.71㎡	실정보고 공원운영과-26127 ('22.7.11.)
	• 새창구간 및 와우교 하단, 대흥 산책로 포장바닥 들뜸으로 인한 단차 핸드그라인더 모서리 갈기 작업 필요(9개소)	• 핸드그라인더 포장 면갈이 신규 : 0식 → 1식
	• 대흥구간 보행자전용공간 콘크리트 바닥(T100) 철거 및 재포장 공정에서 기존 보행자도로는 현상태로 존치해도 무방한 상태로 재포장 필요성이 없어 삭제 • 그에따른 폐기물 상차 물량 감소	• 콘크리트포장 워싱마감 물량 감 반영 : 233.3㎥ → 173.3㎥ • 콘크리트포장 절단물량 감 반영 : 11.1m → 0m • 콘크리트포장 철거물량 감 반영 : 54.2㎡ → 0㎡ • 폐기물 상차 물량 감 반영 : 백호(0.4㎥) 23.36㎥ → 17.8㎥	실정보고에 누락된 사항
부대공	• 낙엽송놓기 철거물량이 2개소 51개로 설계되었으나 실제 70개로 추가물량 발생	• 낙엽송놓기 철거 증 반영 : 51개 → 70개	실정보고 공원운영과-26127 ('22.7.11.)
	• 대흥구간 콘크리트 철거 삭제로 인한 폐콘크리트 물량 전체 삭제	• 폐콘크리트 물량 감 반영 : 19.04t → 0t
	• 대흥동구간 철재휀스 설치구간 내 휀스 뒤편 폐기물 발생으로 처리물량 증가	• 건설폐재류 페기물처리 증 반영 : 2.38t → 3.38t

□ 변경금액

구 분		공 사 비(원)		증 감(원)	비 고
		당 초	변 경
도급액	공 급 가 액	93,067,273	92,986,800	감80,473
	부 가 세	9,306,727	9,298,680	감8,047
	도 급 비 계	102,374,000	102,285,480	감88,520
관 급 자 재		58,194,750	58,194,750	-
총 공 사 비		160,568,750	160,480,230	감88,520

※세부내역 변경내역서 붙임

□ 검토의견

ㅇ 현장여건을 반영하여 위와같이 설계변경하여 시공하고자 함

붙임  1. 실정보고 등 관련 보고서 각 1부

2. 변경내역서 1부

3. 검증확인서 1부.  끝.