문서번호	수도자재관리센터-27690
결재일자	2022. 7. 13.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

						시 민
주무관	계량기관리팀장		소장		요금관리부장		상수도사업본부부본부장	상수도사업본부장
안종인	최성진		박희복		안병희		김권기	07/13
								구아미
협 조
	생산부장					김창중
	시설부장					강호광
	기획예산과장					박은섭
	예산팀장					홍경숙

2022년 투자사업 보류(취소) 결정

(수도계량기 검사설비 현대화사업)

2022. 07.

수도자재관리센터

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료, 빅데이터 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사, 젠더자문관 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 생산•제시•분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등 - (온실가스 감축) 건물 및 수송 분야 에너지사용 절감방법, 폐기물 발생 억제 대책 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등 - (성평등) 성별고정관념•성차별적 내용 포함 여부 검토	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

2022년 투자사업 보류(취소) 결정

(수도계량기 검사설비 현대화사업)

수도자재관리센터 소장 :박희복☎3146-1901 계량기관리팀장 : 최성진☎1939 담당 : 안종인☎1949

******************************* 따라 2022년 세출예산 투자사업으로 추진 중인 수도계량기 검사설비 현대화사업을 보류(취소) 하고자 함

Ⅰ		추 진 근 거

□ 행정2부시장 방침(공공개발기획단-20262, 2022. 3.30.)

ㅇ 『한강철교 남단 일대 지구단위계획』현안사항 검토보고

******************************************

****************************************

□ 본부장 요청사항(2022년 상반기 주요사업 평가, 2022. 6.30)

************************************

Ⅱ		그간 추진경과

□ '19. 8. 1.  본부장 주요사업장 현장방문(수도자재관리센터)

ㅇ 장기사용 및 신뢰성이 부족한 검사설비의 조속한 교체

□ '20. 7.15.  검사설비 현대화 사업 추진계획 수립

□ '21. 2.23.  검사설비 현대화 사업 실시설계용역 계약

□ '21.10.22.  검사설비 현대화 사업 실시설계용역 준공

□ '21.12.23.  검사설비 현대화 사업 변경계획

****************************************

*****************************

******************************************

□ '22. 3. 7.  검사기록실 등 리모델링 공사 발주

ㅇ ’09년 이전한 검사 기록실의 비효율적 공간배치, 근무환경개선 필요

□ '22. 3.30.  한강철교 남단 일대 지구단위계획 현안사항 검토보고

□ '22. 5.10.  수도자재센터 검사기록실 등 리모델링 공사 준공

*************************************

Ⅲ		사업보류(취소)에 따른 조치사항

**********************

ㅇ 집행내역

*****	*****	***
***********	********	***********

ㅇ 집행금액 공사내역

***********************************

***************************************

*********************************

***********************************

********************************

******************************************

□ 수도자재관리센터

*******************************

Ⅳ		향 후 계 획

*************************************

**************************************

*******************************************

붙임  :  행정2부시장 방침 1부.  끝.