투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	강서도로사업소
수신	관리단속과장
(경유)
제목	관급자재 납품기한 연기의뢰[신호등주-2021년 횡단보도 확충정비사업 교통신호기 공사(2차)]

1. 기전과-21539호(2022. 5. 10.) 준공 및 납품기한 연기 검토보고 관련입니다.

2. 2021년 횡단보도 확충정비사업 교통신호기 공사(2차)의 관급자재 신호등주 3종 4본에      대하여 아래와 같이 납품기한을 연기의뢰 하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 신호등주-2021년 횡단보도 확충정비사업 교통신호기 공사 2차

나. 납품요구번호 : 12-21-2-70366-00

다. 계약업체 : (주)청진기전 대표 이기택

라. 납품기한 : 2022년 7월 9일

마. 계약금액 : 5,020,000원

바. 납품기한 연기내용 : 2022년 7월 9일에서 2022년 10월 5일까지 연기

사. 납품기한 연기사유 : 공사 준공기한에 따른 관급자재 사용시기 미도래로 관급자재         납품기한 연기

아. 납품기한 연기사유 귀책소재 : 강서도로사업소

자. 지체상금 부과여부(부과, 미부과) : 미부과.  끝.

	기 전 과 장
주무관	호정오		기전과장	전결 07/13
김형집
협조자
시행	기전과-23741	(	2022.07.13	)	접수		(		)
우	07520	서울특별시 강서구 양천로 237, 강서도로사업소 기전과 (마곡동)	/	http://www.seoul.go.kr
전화	02-2657-7969	/전송	02-2657-7939	/	hjung125@seoul.go.kr	/	대시민공개