문서번호	건축기획과-27705
결재일자	2022. 7. 14.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		건축계획팀장	건축기획과장
김용준		조성국	07/14
			박순규
협조

굴토 전문위 심의내용 이행결과 검토보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 7.

주택정책실

(건축기획과)

굴토 전문위 심의내용 이행결과 검토보고

□ 검토요청 내용

안 건 명	검토요청 내용	비 고
마포구 신촌지역 3-3지구 도시정비형 재개발사업	○ 심의사항 이행의 적정 여부 - 연암의 RQD 및 불연속면 특성을 반영한 지지력 및 침하식으로 지지력 및 침하량을 재계산(구조물 기초 설계기준, 얕은기초 설계기준을 참조)하기 바람. - 버팀보의 해체가능시기는 “콘크리트 표준시방서”를 기준으로 결정하여 시방서 및 시공순서도에 명확한 수치로 표현(강도 및 양생일수)하고, 해체 전 강도측정시험(슈미트해머 등)을 실시하여 건축구조감리의 승인을 받은 후 해체하도록 시방서 및 시공순서도에 명확히 Note로 명기하기 바람. - 굴착계획평면도에 CIP 공법 규격 및 설치 간격 등을 표현하고, 단면도에는 지하매설물 및 지하매설물의 종류, 구역경계, 이격거리, 매설심도 등을 표현하기 바람. - 흙막이 지지공법으로 합성버팀보 공법을 적용하였으므로 유사현장의 적용사례 및 경제성 등을 비교 분석하고, 더욱 상세한 주변 침하방지대책을 제시하기 바람. - 가시설벽체(CIP)의 수직 및 수평변위에 대한 계측계획을 추가하기 바람. - 부지 굴착 시 흙막이벽체 및 지지공법으로 H-Pile+토류판, CIP, Strut 등을 적용하였으므로, 굴착 시 터파기에 따른 안전성확보를 위한 계측계획에 대해서 계측항목별 계측기기의 상세사양(정밀도 등 전자기계적 세부 상세사양), 상세 계측분석 기법, 중고계측기기 사용금지 방안 등에 대해 제시하기 바람.	‘22년 제5차 조건부의결

□ 추진경위

○ ’22.04.14.: '22년 제5차 굴토 전문위원회 심의(조건부의결)

○ ’22.06.16.: 이행결과 검토 요청(마포구 도시계획과→건축기획과)

○ ’22.06.21.: 관련자료 제출(설계사→건축기획과)

○ ’22.06.24.~07.07.: 이행결과 검토(********)

○ ’22.06.29.: 관련자료 보완 요청(***)

○ ’22.07.04.: 관련자료 보완 제출(설계사→건축기획과)

□ 검토결과

위 원 명	검 토 결 과	비 고
*************	○ 이행결과가 적정함을 확인함.
***	○ 시공 중 감리를 철저히 수행하기 바람.
***	○ 버팀보의 해체가능시기에 대한 콘크리트 슬래브 및 벽체의 강도기준과 양생일수에 대해 문구로 명확하게 제시하고 Note로 명기하여 시공 시 확인이 용이토록 하기 바람. ○ 가시설벽체(CIP)의 수직 및 수평변위에 대한 계측을 위해 지중경사계 일부를 지하연속벽 내부에도 설치하여 배면지반과 벽체에 발생하는 변위를 상호계측하여 관리토록 하기 바람.

□ 조치계획

○ 위의 검토결과를 마포구 도시계획과에 통보하고자 함.

붙임  1. 심의의결조서 및 검토결과 1부.

2. 검토의견서 1부.  끝.