문서번호	원수관리과-20963
결재일자	2022. 7. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	강북아리수정수센터소장
정정재		김종필	07/14
			윤창진
협조
	주무관		이정호

2023년도 예산편성

취수장 염소투입설비 유지관리

2022. 07.

강북아리수정수센터

〔원수관리과〕

2023년도 예산편성

취수장 염소투입설비 유지관리

유해화학물질 취급·사용에 따른 안전사고 원인을 제거 위험을 정비하여 선제적으로 안전사고를 예방

Ⅰ		사업개요

□ 추진근거

○「산업안전보건법」제46조제1항 및 제44조

○「화학물질관리법」제24조제1항

○「고압가스 안전관리법」제13조제1항, 제11조제5항

□  시설현황

○ 투입설비

설비명	총계	강북계열	뚝도계열	구의계열
기화기	6대	2대	2대	2대
진공조절기	6대	2대	2대	2대
투입기	12대	3대	3대	3대
인젝터	12대	3대	3대	3대
급속분사 교반기	4대	-	2대	2대
중화설비	3식	1식	1식	1식
부대설비	3식	1식	1식	1식

↑ 염소 저장실(강북계열)

↑ 염소투입 기화기(구의계열)

○ 저장 허가량

구 분	총 계	강북 ․ 뚝도		구의
염소	88톤	64톤		24톤
수산화나트륨	24㎥	8㎥	8㎥	8㎥

○ 운영상 문제점

- 투입설비 노후로  미세한 가스 누출 우려

- 고압 설비(배관 등) 내부압력 상승으로 인한 안전성 미확보

- 투입설비 수시 고장으로 염소 정량 투입 장애 발생

○ 최근 사업 집행현황

(단위 : 천원)

구분	년차별 염소설비 유지관리 집행현황								2023 요구액
	2019		2020		2021		2022. 7. 현재
	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액	예산액	집행액
수선유지비	130,000	130,950	130,000	106,012	130,000	107,635	130,000	117,882	130,000

Ⅱ		사업계획

□ 사업개요

○ 규    모 : 취수장 염소투입설비 유지관리(강북, 뚝도, 구의계열)

○ 사업내용

- 염소투입설비 세관 작업, 고압 밸브 교체, 안전용 예비품 구매

- 가스누설경보기 검지기 정밀점검, 고압배관 표준 압력계 정밀점검

○ 사업기간 : 2023년 2월 ~ 8월

○ 2023년 사업비 : 130,000천원

□ 예산편성 개요

○  주요 사업내용

(단위 :천원)

구 분	2023 예산(안)	2022 예산	증 감	산 출 내 역
수선유지교체비	130,000	130,000		○ 염소투입설비 세관 : 1식 x 30,000천원 = 30,000 ○ 염소설비 예비품 구매 : 1식 x 30,000천원 = 30,000 ○ 염소 고압밸브 교체 : 2식 x 25,000천원 = 50,000 ○ 감지기 및 압력계 점검 : 1식 x 20,000천원 = 20,000 총 계 : 130,000천원

□ 추진일정

○ 계획수립, 설계          :  2023. 2.

○ 계약심사                :  2023. 3.

○ 발주, 계약              :  2023. 3.

○ 공사, 시운전            :  2023. 4. ~ 8.

○ 준공                    :  2023. 8.

Ⅲ		사업효과

○ 유해화학물질로 인한 중대산업재해 예방 및 쾌적한 작업환경 개선으로 안전문화 정착

붙 임   사업 설명서  1부.  끝.