문서번호	급수운영과-26577
결재일자	2022. 7. 14.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	급수관리팀장	급수운영과장
정원훈	전동근	07/14
		代이승우

설계변경(최종) 심사요청에 따른 보고

(2021년 대치1동 외 14개동 2차 상수도공사)

2022.  07. 14. (목)

강남수도사업소

(급수운영과)

설계변경(최종) 심의요청에 따른보고

***************************************************************************************************

□ 공사개요

○ 공 사 명: 2021년 대치1동 외 14개동 2차 상수도공사

○ 공사기간: 2022.03.28. ∼ 2022.07.25.

○ 공사규모: D13~300mm, L=409m

○ 도 급 액: 금***********원

○ 도 급 자: **************

□ 설계변경 사유

○ 시공물량 물량변경 및 신규공정 등

- 시공물량 변경[아스팔트 포장절단(200mm 이하)] 등

- 신규공정 추가[잔토처리(0.7터파기동시상차)] 등

□ 설계변경 내역(도급비 ****** 증액)

(단위: 원)

구 분	당 초 금 액	변 경 금 액	증·감
도 급 비	***********	***********	************
공 급 가 액	***********	***********	************
부가 가치세	**********	**********	***********

□ 향후계획

○ 계약 물량 증·감 발생에 따른 계약금액 변경(도급비 ******)으로 본부 안전조사과에 설계변경 심사요청하고자함

붙임  설계내역서 1부.  끝.