문서번호	토목부-27045
결재일자	2022. 7. 14.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		교량건설과장	토목부장
이회진		황윤기	07/14
			하현석
협조

- 창동 상계 동서간 연결교량(보차도교, 보행교) 건설공사 -

실정보고(물가변동 계약금액조정-3회)검토 보고

2022. 07

도시기반시설본부

(토  목  부)

- 창동 상계 동서간 연결교량(보차도교, 보행교) 건설공사 -

실정보고(물가변동 계약금액조정-3회)검토 보고

『창동 상계 동서간 연결교량(보차도교, 보행교) 건설공사』물가변동 계약금액조정(제3회) 실정 보고 검토결과 및 조치계획을 보고 드림

1		근 거

○ 물가변동으로 인한 계약금액조정(3회) 검토보고(보차도교) - 창동상계 제22-142호('22.07.13.)

○ 물가변동으로 인한 계약금액조정(3회) 검토보고(보행교) - 창동상계 제22-143호('22.07.13.)

2		공 사 개 요

□ 보 행 교

○ 사 업 명 :  창동 상계 동서간 연결교량 보행교 건설공사

○ 규    모 :  보행교 건설(연장 110.5m, 폭 10.0~15.0m)

○ 사업기간 :  '21.04.19. ∼ '24.04.18. (1차 '21.04.19. ∼ '22.12.02.)

○ 도 급 비 :  *************************

○ 시공사/건설사업단 : *****************************

□ 보차도교

○ 사 업 명 : 창동 상계 동서간 연결교량 보차도교 건설공사

○ 규    모 : 보차도교 건설(연장 118.0m, 폭 32.0m)

○ 사업기간 : '21.04.19. ∼ '24.04.18. (1차 '21.04.19. ∼ '22.11.22.)

○ 도 급 비 : *************************

○ 시공사/건설사업단 : *******************************

3		물가변동 조정현황

□ 보차도교

(단위 : 원)

구 분	1회	2회	3회	조정요건
직전조정일 (기준시점)	***********	***********	***********	****
조정기준일 (비교시점)	***********	***********	***********	***********
물가변동율	*****	*****	*****	*******
조정금액	***********	***********	***********

□ 보 행 교

(단위 : 원)

구 분	1회	2회	3회	조정요건
직전조정일 (기준시점)	***********	***********	***********	****
조정기준일 (비교시점)	***********	***********	***********	***********
물가변동율	*****	*****	*****	*******
조정금액	***********	***********	***********

4		물가변동 조정(3회) 세부내역

□ 보차도교

○ 물가변동 조정 요건

구 분	검 토 항 목		검 토 내 용	결과	비 고
조정방법	계약서 명기사항 확인		품목조정률 적용	적합
적용요건	①물가변동 경과기간	기준시점으로부터 90일 이상 경과	90일 경과 -기준시점 : 2021.09.23. -비교시점 : 2022.05.01.	적합	219일
	②물가변동 조정율	3/100 이상 증감	조정율 : 4.24% ≥ 3.00%	적합	4.24%
	③조정기준일 (비교시점)	①,② 동시 충족 되는 최초의 날	조정기준일 : 2022.05.01. (비교시점)	적합	-

○ 물가변동 조정내역 총괄표

- 물가변동 조정 적용금액 : ************

구 분		조 정 금 액	비 고
① 물가변동 대상공사의 계약금액		****************
② 물가변동 적용 제외 금액		***************
물가변동 조정기준일 현재 공정율	예정공정률	*******
	실행공정률	*******
	제외공정률	*******
③ 물가변동 적용 대가		****************	*****
④ 품목조정율		******
⑤ 물가변동 등락 대상 조정 금액		*************	*****
⑥ 선금급 공제금액		***************
⑦ 기타 공제금액		*****
⑧ 물가변동 조정 적용금액		*************	*********

□ 보 행 교

○ 물가변동 조정 요건

구 분	검 토 항 목		검 토 내 용	결과	비 고
조정방법	계약서 명기사항 확인		품목조정률 적용	적합
적용요건	①물가변동 경과기간	기준시점으로부터 90일 이상 경과	90일 경과 -기준시점 : 2021.09.21. -비교시점 : 2022.06.01.	적합	252일
	②물가변동 조정율	3/100 이상 증감	조정율 : 3.15% ≥ 3.00%	적합	3.15%
	③조정기준일 (비교시점)	①,② 동시 충족 되는 최초의 날	조정기준일 : 2022.06.01. (비교시점)	적합	-

○ 물가변동 조정내역 총괄표

- 물가변동 조정 적용금액 : ************

구 분		조 정 금 액	비 고
① 물가변동 대상공사의 계약금액		***************
② 물가변동 적용 제외 금액		**************
물가변동 조정기준일 현재 공정율	예정공정률	*******
	실행공정률	*******
	제외공정률	*******
③ 물가변동 적용 대가		***************	① - ②
④ 품목조정율		******
⑤ 물가변동 등락 대상 조정 금액		*************	③ × ④
⑥ 선금급 공제금액		***************
⑦ 기타 공제금액		*****
⑧ 물가변동 조정 적용금액		*************	⑤ - ⑥ - ⑦

5		검토결과 및 조치계획

물가변동으로 인한 계약금액 조정(3회) 내역서를 검토한 결과 품목조정율

산정방법, 물가변동 적용대상금액, 선급금 공제금액 및 물가변동 조정 적용

금액 등 건설사업관리단 보고내용은 적합한 것으로 판단되며 향후 설계변경에

반영하고자 함

붙 임 : 건설사업관리단 물가변동 계약금액조정 검토 보고서 각 1부. 끝.