문서번호	급수운영과-26690
결재일자	2022. 7. 15.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관	급수운영팀장	급수운영과장
이덕규	임인택	07/15
		이규희
협 조

중간 집하장 및 사토장 변경 보고

(2022년 방이동외 14개동 상수도공사)

2022. 7

강동수도사업소

(급수운영과)

중간집하장 및 사토장 변경 보고

□ 공사현황

○ 공 사 명: 2022년 방이동 외 14개동 상수도공사

○ 공사기간: 2022.5.3. ~ 2023.6.30.

○ 계약금액: *************

○ 공사개요: D=15~300mm, L=1,544m

○ 계약상대자: 부기건설(주)  대표 오만택

□ 보고내용

상기 공사와 관련하여 계약상대자가 제출한 『중간집하장 및 사토장 변경 보고 제출』에 대한 검토 보고임

○ 중간집하장 변경

- 현황 및 문제점

․ 설계는 관내 3㎞ 이내에 중간집하장 선정으로 되어 있으나, 최근 감일지구 개발 등 관내 3㎞ 이내에는 적정한 부지를 찾을 수 없으며, 산출된 면적(144㎡) 또한 협소하여 변경이 필요함.

- 부지임대 현황

․ 소 재 지: ***************

․ 임대면적: 750㎡

․ 임대기간: 2022.5.1.~ 2023.6.30.

․ 임 대 료: *************

○ 사토장 변경

- 현황 및 문제점

․ 당초 사토장 설계는 토석정보시스템에 입력된 경기도 남양주시 진천읍 연평리 242-1(L=28.9㎞)로 하였으나, 현재 사토장을 운영하지 않아 변경이 필요함.

- 사토장 변경 현황

․ 소재지: *********************

․ 토지소유자: ***

․ 매립시공자: ***

․ 집하장~사토장 거리: L=42.4㎞

- 단가비교

공 종	규 격	단위	단 가	비 고	증감
잔토처리	24DT, 집하장→사토장(28.9㎞)	㎥	13,649	당초
잔토처리	24DT, 집하장→사토장(42.4㎞)	㎥	18,132	변경	증 4,483
잔토처리	24DT, 집하장→사토장(56.1㎞)	㎥	21,892	인천매립지일때	증 8,243

□ 검토의견

○ 중간집하장 변경

- 운반거리 확인: 현장~남양주시 별내면 산8 까지의 운반거리는 L=23㎞ 이나 방이역 중심에서 서울시 경계거리인 L=10㎞를 반영하여 적정

- 부지임대료: 당초 계약된 부지 임대료(금15,300,000원)를 초과하지 않는 범위에서 반영하여 적정

○ 사토장 변경

- 운반거리 확인: 적정함

□ 행정사항

○ 중간집하장 및 사토장 변경에 대하여 계약상대자 부기건설(주)에 승인통보하고 설계변경시 반영하고자 합니다.

붙임  중간집하장 및 사토장 변경 실정보고서 각1부.  끝.