문서번호	토목부-27107
결재일자	2022. 7. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	교량건설과장	토목부장
이승주	황윤기	07/15
		하현석

물가변동으로 인한 계약금액 조정(제1회) 검토보고

[올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사 건설폐기물 처리용역]

2022. 7.

도시기반시설본부

(토    목    부)

- 올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사 건설폐기물 처리용역 -

물가변동으로 인한 계약금액 조정(제1회) 검토보고

『올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사 건설폐기물 처리용역』의 계약상대자로부터 물가변동으로 인한 계약금액 조정 요청이 있어 이에 대한 검토보고임

Ⅰ		관 련 근 거

□ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제22조, 시행령 제73조, 시행규칙 제72조

□ 지방자치단체 입찰 및 계약집행기준 제14장 용역계약 일반조건

□ 폐기물용역 물가변동으로 인한 계약금액 조정 신청(올대감 22-124, '22.07.12.)

Ⅱ		용 역 개 요

□ 용 역 명 : 올림픽대교 남단IC 연결램프 구조개선공사 건설폐기물 처리용역

□ 규    모 : 폐콘크리트 23,273톤, 폐아스콘 21,917톤, 혼합폐기물 1톤, 폐기물운반 22,331㎥

□ 기    간 : 2016.08.11. ~ 2022.12.31. (7차 '22.5.10.~12.31.)

□ 도 급 비 : 1,210백만원 (7차 275백만원)

□ 용 역 사 : (자)금강개발

Ⅲ		검 토 내 용

□ 물가변동 조정요건 및 조정방법

○ 계약금액 조정요건 : 2가지 조건 동시 충족

- 계약체결 후 또는 직전 물가변동으로 인한 계약금액 조정일로부터 90일 경과

- 품목조정률이 100분의 3이상 증·감된 경우

○ 계약금액 조정방법 : 품목조정률

구분	직 전 기준일	조 정 기준일	경과일수	조정율	대상여부	비고
1회	‘16.08.10. (최초계약일)	‘22.01.01.	1,968일	28.5%	대상

□ 물가변동 적용대상 검토

○ 대상수량 : 7차분 (※ 전체수량–준공수량(1~6차분))

구분	계약수량 (전체분)	단위	제외수량 (1차분~6차분)	적용수량 (7차분)	비고
********	*****	*	*****	*****
*******	******	*	*****	*****
********	******	***	******	*****
*******	******	***	******	*****

○ 조정단가                                                  (단위 : 원)

구 분	계약단가 ['16.08.10]	물가변동['22.01.01]			비고
		등락률	등락폭	조정단가
********	******	******	*****	******
*******	******	******	*****	******
********	******	******	*****	******
*******	******	******	*****	******

※ 등락폭 = 계약단가 × 등락률

등락률 = (물가변동당시가격-입찰당시가격)/입찰당시가격

□ 계약금액 조정내역 검토

○ 조정금액 = 대상수량 × 조정단가                          (단위 : 원)

구분	물가변동 적용수량	단위	당초		변경(ES적용)		등락폭		비고
			계약단가	계약금액	조정단가	조정금액	단가	금액
********	*****	*	******	**********	******	**********	*****	*********
*******	*****	*	******	**********	******	**********	*****	**********
********	*****	***	******	**********	******	**********	*****	**********
*******	*****	***	******	**********	******	***********	*****	**********
*****				*********		**********		*********
**				**********		**********		*********
****				***********		***********		**********
***				**********		**********		*********
***				***********		***********		**********

************************

Ⅳ		조 치 의 견

□ 물가변동으로 인한 계약금액 조정 요청 건에 대하여 관련 규정 등을 검토한 결과, 용역사 요청 및 책임건설사업관리기술인 검토의견이 타당한 것으로 판단되므로 향후 설계 변경시 반영하고자 함.

붙임  물가변동으로 인한 계약금액 조정 요청 공문(검토의견서) 및 보고서  1부.  끝.