문서번호	설비부-26164
결재일자	2022. 7. 15.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	환경설비과장	설비부장
강민우	김현기	07/15
		김호성

『광역소공인특화지원센터 건립 전기공사』

관급자재(실내조명등) 계약취소 및 재구매 검토보고

2022. 7월

도시기반시설본부

(설 비 부)

『광역소공인특화지원센터 건립 전기공사』

관급자재(실내조명등) 계약취소 및 재구매 검토보고

『광역소공인특화지원센터 건립 전기공사』에 소요되는 관급자재(실내조명등) 관련, 건설사업관리기술단으로부터 제출된 계약취소 및 재구매 계약에 대한 검토보고 건에 대하여 검토결과 보고 드림

1		공사개요

□ 공 사 명 : 광역소공인특화지원센터 건립 전기공사

□ 위    치 : 서울특별시 성동구 아차산로 17길 9

□ 규    모 : 지하2층/지상7층, 연면적 2,711,51㎡

□ 기    간 : 총차 '20.08.12. ~ '22.09.06.(2차 '21.10.29. ~ '22.09.06.)

□ 공 사 비 : ********************************

□ 도 급 사 : ㈜도원 외 1개사

□ 감 리 사 : ㈜포스코에이앤씨 외 1개사

2		관련근거

□ 물품 다수공급자계약 특수조건 제26조 제4항

제26조 ④항 수요기관의 불가피한 사정으로 납품기한을 추가 연기할 필요가 있는 경우 수요기관의 장은 계약상대자와 협의하여 해당 납품요구를 취소하고, 추후 납품을 희망하는 때에 해당 계약상대자에게 새로운 납품요구를 지시할 수 있다.

□ 관급자재 계약취소 및 재구매 검토 보고  : 광역CM-0351호

3		검토내용

□ 관급자재 계약취소 및 재구매 검토

○ 관급자재 계약취소

품 명	납품요구번호 (계약번호)	계약자	계약금액	납품기한
*****	**************** *****************	****	***********	**********

○ 관급자재 재구매

품 명 (계약번호)	구매방법	계약자	구매금액	납품기한
***** *****************	**** *******	****	***********	**********

○ 계약취소 및 재구매 사유

- 선행공종(건축) 공정에 따른 상기 관급자재 설치시기 미도래로 납품기한을 연장하여야 하나

- ******************************************************************************************************************************************************************************

4		건설사업관리단 기술검토 의견

□ 본 공사의 관급자재는************************************구매계약 취소 후 재구매함이 적정하다고 판단됨

5		보고자 의견

□ 건설사업관리기술인의 검토의견이 적정하다고 판단되어 계약부서

(총무부)에 관급자재(실내조명등) 구매계약 취소 및 재구매 의뢰하고자 함

붙임  건설사업관리단 관급자재 계약취소 요청 공문(합의각서 포함) 1부