실정보고(조경) 검토결과(노들로 구조개선공사)

공 사 명

노들로 구조개선공사

공사개요

◦ 위    치 : 노들로(양화교~한강대교)

◦ 규    모 : 총 연장 8.5㎞

◦ 공사기간 : '21.10.25.~ '24.01.24.

◦ 도 급 비 : 7,584백만원

◦ 시공사 : 하송종합건설(주)외 1

◦ 감리단 : (주)도화엔지니어링 외 2

◦ 설계사 : (주)도화엔지니어링

보고 건명

「노들로 구조개선공사」수목제거 및 이식 실정 보고

보고 배경

◦ 관련근거 : 업무지시(도기본-22-4024호('22.4.8.), 도기본-22-5930호('22.5.18.))

◦ 저촉수목 처리계획 승인 및 관련 업무지시 후속절차인 설계변경을 위한 건임

보고요지

◦ 저촉수목 제거수량 및 폐기물 처리량 반영(증가) 필요 등

◦ 물량 증가에 따른 공사비 74,487천원 증액 필요

건설사업

관리단

검토의견

◦ 공사범위내 수목 처리계획 승인 및 관련 업무지시에 따른 사항으로 변경되는

물량의 규모 및 공사비 변경 내용도 적절하다고 판단됨

공사관리관

검토결과

◦ 업무지시(수목처리계획 승인)에 따른 사항으로 변경사유는 타당

◦ 변경의 규모 및 내용도 적절한 것으로 판단됨

경내용

물량

변경

◦변경내용

공 종 명	규 격	단 위	수 량		비고(증감)
			변경전	변경후
느티나무 식재	H4.0*R15	주	22	25	증 3
교목이식	R7~R24	주	24	27	증 3
관목이식	H1.2	주	-	353	증 353
교목제거	B10~75	주	75	143	증 68
관목제거	H0.5~H1.2	주	-	1,260	증 1,260
수목전정	B21~40	주	-	5	증 5
임목폐기물	운반,처리	ton	168	298	증 130

- 변경사유 : 공사구간내 저촉수목 처리물량 반영 필요

- 감리의견 : 적정함

◦검토결과 : 현장확인을 통해 지시한 내용과 동일하여 적정함

공종

추가

◦변경내용 : 교목제거(B10,반출) 외 28종

- 변경사유 : 물량 추가 및 현장체거 물량 반영

- 감리의견 : 적정함

◦검토결과 : 현장확인을 통해 지시한 내용과 동일하여 적정함

사업비

변경

◦변경내용 : 210,945천원 → 285,432천원 (증 74,487천원)

- 변경사유 : 물량 변경

- 신규비목 단가적용 : 낙찰율 적용(공사계약 일반조건 제7절1.가.2)

- 감리의견 : 적정함

◦검토결과 : 낙찰율 적용한 것으로 계산에 오류 없음

사업비	○ 사업비 74,487천원 증액되나 수용 가능(주무부서 실무협의 완료)
행정절차	○ 설계변경 자문위원회(소위원회) 이행 필요(우리 본부 방침에 의거)
공기영향	○ 영향없음
처리의견	○ 기 업무지시한 사항을 사후 반영하는 것으로 변경사유가 타당함 ○ 변경하는 물량 및 계약금액 변경도 이상없음 ○ 아래 조건을 부여하여 승인하고자 함 - 설계변경 자문위원회(소위원회) 심의를 득할 것
비 고	붙임 : 건설사업관리단 실정보고 1부. 끝.
결재	주무관	이재미	조경시설과장	현학범	방재시설부장	전결 07/18
						이동훈