문서번호	계측관리과-23180
결재일자	2022. 7. 18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		계측관리과장	요금관리부장
최용원		정임근	07/18
			안병희
협 조
	계량기관리팀장			최성진
	주무관			김준오

수도계량기 보온재·보온덮개 구매 계획

2022. 7. 18.

요금관리부

(계측관리과)

수도계량기 보온재·보온덮개 구매 계획

겨울철 한파에 취약한 지역의 벽체형 수도계량기 보온재 및 보온덮개를 구매·설치하여 동파예방 및 안정적인 아리수 공급에 만전을 기하고자 함

Ⅰ		추 진 근 거

□ '21/22년 수도계량기 동파대책 결과보고 (계측관리과-20319호, '22.4.5.)

□  계량기함 보온재, 보온덮개 수요량 제출요청 (계측관리과-21668호, '22.5.24.)

Ⅱ		추 진 방 향

□ 설치대상 : 동파취약한 공동주택 및 연립·다세대 주택에 우선 설치

○ (보  온  재) 최근10년 이내 동파가 발생한 수전 또는 유사한 환경에 설치된 수전

○ (보온덮개) 2004년 이전에 준공되었거나 방풍창 없는 복도식 공동주택 계량기함 또는 계단식 공동주택의 저층 계량기함

벽체형 PE보온재	자체보온재(내복)	계량기함 보온덮개

□ 보온덮개는 서울시 관리 수도계량기가 있는 세대만 배부

○ 관련근거:「서울특별시 수도조례」제40조(급수설비의 관리책임 등) 제1항

대지경계선 안의 급수설비 관리는 수도사용자 등의 책임으로 하고 대지경계선 밖의 급수설비 관리는 시의 책임으로 한다.

○ 공동주택에서 자체 관리하는 수전(서울시 수도계량기 미설치 세대)은 매월 세대 별 수도요금을 경감 받으므로, 보온제공 시 중복 수혜에 해당함

Ⅲ		구 매 계 획

□ 수도계량기 보온재

○ 구매 규격 : 수량계 보호통(벽체형), 동파방지보온재

○ 보온재 수량

(단위 : 개, 천원)

구 분	합 계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
벽체형 PE보온재	4,247	466	1,107	845	-	566	761	502	-
자체보온재	7,500	1,308	-	845	1,785	566	761	502	1,733
합 계	11,747	1,774	1,107	1,690	1,785	1,132	1,522	1,004	1,733
재배정액	172,618	24,305	23,373	27,187	19,742	18,210	24,484	16,151	19,166

○ 소요예산 : 173백만원

- 산출근거 : (4,247개 * 21,000원 + 7,500개 * 11,000원) * 100.54%

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수도계량기교체, 수선유지비

⇒  각 수도사업소에 예산 재배정하여 사업추진

○ 계약방법 : 각 사업소별 계약시행(조달구매 등)

□ 계량기함 보온덮개

○ 재  질 : (내부) 저밀도 폴리에틸렌(LDPE, LLDPE) 4mm두께 에어캡

(외부) 폴리에틸렌 (PE) 0.05mm두께 × 2겹

○ 제작규격

- 대 형 : 가로 65cm × 세로 75cm (크기 및 접착면적 확대, 접착력 조정)

- 소 형 : 가로 55cm × 세로 45cm (접착면적 확대, 접착력 조정)

○ 보온덮개 수량

(단위 : 개)

구 분	합 계	중부	서부	동부	북부	강서	남부	강남	강동
대 형	260,100	5,500	15,700	17,100	104,900	58,300	13,900	24,700	20,000
소 형	16,100	0	3,500	400	1,200	6,400	4,600	0	0
합 계	276,200	5,500	19,200	17,500	106,100	64,700	18,500	24,700	20,000

○ 소요예산 : 249백만원

- 산출근거 : 276,200개 * 900원

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 배급수비, 수도계량기교체, 수선유지비

⇒  수도자재관리센터에 예산 재배정하여 사업추진

○ 계약방법 : 제한경쟁입찰(중소기업자간 경쟁제품)

Ⅳ		추 진 일 정

□ 보온재 구매·설치

○ 예산 재배정 (계측관리과 ⇒ 각 사업소)	: '22. 7.
○ 보온재 구매설치 (업체, 사업소)	: '22. 8. ~ 10.
○ 보온재 설치결과 제출 (사업소 ⇒ 계측관리과)	: '22. 11. 30.까지

□ 보온덮개 구매·배포

○ 예산 재배정 (계측관리과 ⇒ 수도자재관리센터)	: '22. 7.
○ 보온덮개 구매 (수도자재관리센터)	: '22. 8. ~ 10.
○ 보온덮개 납품 및 배부 완료 (업체, 사업소)	: '22. 10.
○ 보온덮개 설치결과 확인 (각 사업소)	: '22. 11. 30.까지

Ⅴ		행 정 사 항

□ 기관별 업무분담

○ 본부 계측관리과

- 수도계량기 보온재, 보온덮개 구매 계획 수립

○ 본부 기획예산과

- 예산 재배정(계측관리과 ⇒ 수도자재관리센터, 각 수도사업소)

○ 수도자재관리센터

- 벽체형 보온덮개 제작구매 및 배부

○ 수도사업소 현장민원과

- 벽체형 보온덮개 수령확인 결과 수도자재관리센터 제출

- 보온재 및 보온덮개 설치결과(붙임4) 본부 계측관리과에 제출

붙임  1. 보온재 및 보온덮개 수요조사 결과 각 1부.

2. 보온덮개 제작구매 지침서(안) 1부.

3. 보온덮개 디자인 대형․소형 각 1부.

4. 보온재 및 보온덮개 설치·배부결과(양식) 각 1부.  끝.