문서번호	한양도성도감-23671
결재일자	2022. 7. 18.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		도성관리팀장	한양도성도감과장
왕승찬		이원재	07/18
			김홍진
협조

2차 공사 설계변경 검토보고(제1회)

(남산 회현자락 한양도성 유적전시관)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2022. 7.

문  화  본  부

(한양도성도감)

2차공사 설계변경 검토보고

(남산 회현자락 한양도성 유적전시관)

한양도성도감과장 :김홍진☎2133-2671 도성관리팀장 :이원재☎2670 담당 : 왕승찬☎2671

「남산 회현자락 한양도성 현장유적전시관」전시관리실의 외부 조경공사 변경계획을 보고 드림

Ⅰ		공사개요

□ 공사명: 남산 회현자락 한양도성 현장유적전시관 조성공사

□ 위  치: 중구 소파로 46외 13필지(43,630㎡)

□ 계약금: 4,214,640,000원 (2차 1,308,757,000원)

□ 공사기간: 2018.11.23. ~ 2022.9.20.

□ 시공자: 원택건설(주) 대표 ***, 명헌건설(주)

□ 감리자:(주)금성종합건축사사무소 대표****

Ⅱ		설계변경 내용

□ 설계변경 근거

- 공사계약 일반조건 제19조(설계변경 등)

- 서울특별시 공사계약 특수조건 제13조(발주기관의 필요에 의한 설계변경)

□ 설계변경 대상: 수목주변 석축 철거여부

현황: 노거수(고목) 주변 기존석축	설계: 노거수(고목) 주변 기존석축 철거

□ 설계변경 검토사유

- 전시관리실 재설계에 대한 도시공원위원회의 심의결과 노거수를 보호하고 건물과 어울리도록 기존석축을 철거하여 조성토록 하였으나

노거수목의 주변을 굴착해본 결과 뿌리가 깊게 내려가지 않아 석축을 철거할 경우 오히려 노거수가 전도되거나 고사될 위험이 있음

- 또한, 노거수는 높이가 15m의 대형 교목으로서 수령이 오래된 고목이므로 현재의 위치에서 조금이라도 변형·이전할 경우 뿌리의 손상이 발생하여 고사될 위험이 큼

- 노거수 주변을 완만한 경사지(마운딩)로 조성할 경우 석축에 인접한 위안부 동상주변 보행자 동선에 간섭이 발생

※ 조경기술자 검토의견: 남산감리22-27호('22.7.4.)

전시안내센터 터파기 시 노거수의 뿌리가 노출된 사례가 있으며, 기존석축을 철거할 경우 노거수의 뿌리가 추가로 변형·제거되어야 함

노거수 주변의 마운드 조성 높이로는 노거수의 뿌리를 안정적으로 지지할 수 없어 교목이 전도될 위험이 있으므로 석축을 유지하는 것이 바람직함

Ⅲ		처리의견

□ 노거수의 기존석축을 철거하고 완만한 경사지(마운딩)로 조성할 경우 뿌리가 노출되어 대형 교목이 쓰러지거나 고사될 수 있으므로 노거수의 안정적인 보존과 생육을 위해서는 석축을 존치하는 것이 적정해 보임

※ 기존 석축의 존치는「공원녹지법」제16조의2(공원조성계획의 결정) 제3항에 따라 공원의 특색에 변화를 가져오지 아니하고, 공원시설 부지면적의 변경이 없으므로 경미한 변경에 해당함

□ 석축을 존치하고 공사내용 변경에 따른 비용은 정산 및 설계변경 절차를 거쳐 처리하고자 함

붙임: 감리자 기술검토의견서 및 설계자 의견서 1부.  끝.