문서번호	미디어콘텐츠산업과-23615
결재일자	2022. 7. 18.
공개여부	부분공개(5,6)
방침번호

			시 민
주무관		애니산업지원팀장	미디어콘텐츠산업과장
박춘복		김성미	전결 07/18
			은용경
협조

「(구)서울애니메이션센터 재건축사업 역사전시실 전시기획용역」

준공기간 연장 검토 보고

2022.  7.

경 제 정 책 실

(미디어콘텐츠산업과)

「(구)서울애니메이션센터 재건축사업 역사전시실 전시기획용역」

준공기간 연장 검토 보고

「(구)서울애니메이션센터 재건축사업 역사전시실 전시기획용역」에 대한 준공기간 연장 검토결과를 보고 드림

□ 용역개요

ㅇ 용 역 명 : (구)서울애니메이션센터 재건축사업 역사전시실 전시기획용역

ㅇ 용역기간 : '22. 2. 22 ~ 7. 21

ㅇ 용역금액 : **********************

ㅇ 계 약 자 : 건축사사무소엘아이엠(LIM) ******

ㅇ 용역내용

- 역사전시실 기본방향, 전시 연출 시나리오 구상 및 교육 · 행사 구상

- 전시 기본계획 수립 및 기획설계 도면 작성, 실시설계 용역비 산출내역 작성 등

□ 추진경위

ㅇ '22. 2. 22 : 용역 계약 및 착수

ㅇ '22. 5. 10 : 1회 중간보고

ㅇ '22. 6. 24 : 2회 중간보고

ㅇ '22. 7. 15 : (용역업체)용역 준공기간 연장 요청********

□ 관련근거

ㅇ「지방자치단체 입찰 및 계약 집행기준」용역계약 일반조건 제14장 제7절

(계약기간의 연장)

ㅇ 역사전시실 전시기획용역 준공기간 연장 요청서 제출건

: 건축사사무소 엘아이엠(LIM) (LIM22-07호, '22. 7. 15)

***************************

□ 계약변경 내용

ㅇ 용역 준공기간 연장                                       (단위 : 원)

*************************************************************************************************************************************

********

*************************************

※  붙임 '준공기간 연장 요청서' 내용 참조

ㅇ 준공기간 연장 귀책 소재 : 서울특별시

ㅇ 지체상금 부과 여부 : 미 부과

□ 처리의견

ㅇ 위와 같은 사유로 준공기간 연장에 따른 계약 변경을 시행하여 용역

추진코자 함

붙임  용역 준공기간 연장 신청서 및 관련서류.  끝