투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신	여의도공원관리사무소장
(경유)
제목	변경계약 체결 통보(여의도공원 공원등주 정비공사)

1. 여의도공원관리사무소-23323호(2022. 7. 15.)와 관련됩니다.

2. 위 호와 관련하여 다음과 같이 변경계약이 체결되었음을 알려 드리니, 계약긴간 내 공사가 무위 준공될 수 있도록 만전을 기하시기 바랍니다.

가. 건명: 여의도공원 공원등주 정비 공사

***************************

다. 계약금액: 금22,000,000원(금이천이백만원)

라. 공사기간: 2022. 6. 20.~ 2022. 7. 19.

마. 변경내용: 준공기한 변경

○ 당초: 2022. 7. 19. → 변경: 2022. 7. 25.

붙임  공사변경계약서 1부.  끝.

	공 원 운 영 과 장
주무관	김호영		재무팀장	양근대		공원운영과장	07/18
류기혁
협조자
시행	공원운영과-26535	(	2022.07.18	)	접수		(		)
우	03901	서울특별시 마포구 월드컵로, 243-60	/	http://parks.seoul.go.kr
전화	02-300-5512	/전송	02-300-5527	/	sky500611@seoul.go.kr	/	부분공개(6)