문서번호	시설관리과-26842
결재일자	2022. 7. 18.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		시설운영팀장	시설관리과장
탁기홍		代조광희	07/18
			송병욱
협조

설계변경 심의위원회 개최결과 보고(2021년 미아동 외 4개동 상수도공사 및 장기사용 배급수관 정비공사 건설폐기물처리용역)-2차최종

설계변경 심의위원회 개최결과 보고

2022.  7.

북부수도사업소

(시설관리과)

설계변경 심의위원회 개최결과 보고

우리사업소에서 시행 중인『2021년 미아동 외 4개동 상수도공사 및 장기사용 배급수관 정비공사 건설폐기물처리용역』에 대하여 처리물량의 증·감이 발생하여 설계변경 심의위원회를 개최하고 결과를 보고함.

□ 용역 현황

ㅇ 용 역 명 : 2021년 미아동 외 4개동 상수도공사 및 장기사용 배급수관정비공사 건설폐기물처리용역(장기계속단가계약)

ㅇ 용역개요

- 당  초 : **************************

- 변  경 : ****************************

ㅇ 용역기간 : 2021. 6. 11. ~ 2022. 7. 31.

ㅇ 용 역 비

- 당  초 : ***********

- 변  경 : ***********

ㅇ 도 급 사 : *****************

□ 심의회 개최

ㅇ 심의일정 : *********************

ㅇ 심의장소 : 북부수도사업소 시설관리과

ㅇ 위 원 장 : ********

ㅇ 간    사 : ********

ㅇ 심의위원 : ***************************

□ 심의 결과

ㅇ 설계변경의 타당성: 적정

ㅇ 제경비 적정 산정 및 적용 적정성: 적정

ㅇ 계약 뱐동(증,감)물량 계약단가 낙찰률 적용 적정여부: 적정

ㅇ 각종 제반 규정 준수여부: 준수

ㅇ 관련규정의 불명확한 내용에 대한 검토: 적정

붙임  1. 설계변경 내역서 1부

2. 설계변경 심의 결과서 1부

3. 설계변경 합의서 1부.  끝.